신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
(기상청) 연구용역사업 관리규정	기상청 연구용역사업 관리규정
제1장 총칙	제1장 총 칙
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) --------------------------------------.
1. “연구용역사업(이하 “용역사업”이라 한다)”이란 일반연구비로 편성된 예산으로 수행하는 사업을 말한다.	<삭 제>
2. “연구용역과제(이하 “용역과제”라 한다)”란 용역사업을 사업목적에 따라 단일 또는 여러 과제로 구분하여 단위부서에서 수행하는 과제를 말한다. <후단 신설>	1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.2. “연구용역과제(이하 “용역과제”라 한다)”란 용역사업을 사업목적에 따라 단일 또는 여러 과제로 구분하여 단위부서에서 수행하는 과제를 말한다. 단, 자체연구개발사업의 일부항목 중 자체연구인력으로 추진이 곤란하거나 외부기관에 발주하는 것이 더 효과적일 것으로 판단되어 외부에 위탁하여 수행하는 연구과제를 포함한다.
3. “기상청 연구관리시스템(https://rnd.kma.go.kr) (이하 “연구관리시스템”이라 한다)”이란 「기상업무 연구개발사업 처리규정」제2조제10항에서 정한 시스템을 말한다.	3. ---------------------------------------------------------------------- 「기상업무 연구개발사업 처리규정」제2조제14호----------------------.
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
제3조(적용범위) ① 이 규정은 기상청의 일반연구비 및 시험연구비로 추진하는 용역사업에 적용한다. 단, 다음 각 호에 대해서는 적용하지 아니한다.	제3조(적용범위) ① -------------- 일반연구비--------------------------------------. -------------------------------------.
1.「기상청 정책연구 관리규정」에 따라 수행하는 정책연구	1.「기상청 정책연구 관리규정」을 적용받는 정책연구용역
2.「정보화업무규정」을 적용받는 정보화사업의 일반연구비로 수행하는 용역사업	2.------------------------- 정보화 성격의 --------------------------
② 용역사업이 2천만원이하의 일반연구비로 추진되는 경우와 현안해결을 위해 조속한 사업추진이 필요하여 기상청장의 승인을 받아 추진하는 경우에는 제5조 및 제6조의 규정을 적용하지 아니한다.	<삭 제>
<신 설>	제3조의2(추진방법) ① 용역사업의 추진은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에서 정하는 바에 따라 진행하여야 하며, 제4조의2, 제5조 및 제6조에 따라 추진계획서에 대한 심의를 완료하여야 한다. 다만, 대내외 쟁점 해결을 위해 조속한 사업추진이 필요하여 기상청장의 승인을 받아 추진하는 경우에는 제5조 및 제6조의 규정을 적용하지 아니한다. ② 용역사업의 특성이 그 성질상 수년간 계속하여 추진할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 경우에는 국가계약법 제21조에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있다. ③ 장기계속계약을 추진하고자 하는 경우에는 국가계약법 시행령 제69조에 따라 계약기간 전체에 대한 사업계획을 사전에 수립하여 기상청장의 승인을 받아야 한다. ④ 수요부서의 장은 용역사업 계약이 체결된 후 5일 이내에 용역과제 체결현황을 작성(별지 제3호서식)하여야 한다. 다만, 2천만원 이하 수의계약의 경우, 계약상대자의 사업수행계획서를 점검하여 점검결과서(별지 제3호의2서식)를 작성하여야 한다.
제4조(연구용역심의위원회 구성) ① 용역사업의 체계적 관리를 위하여 연구용역심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.	제4조(연구용역심의위원회 구성) ① 기상청장은 용역사업---------------------------------------------------.
② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 8명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하되, 외부위원이 전체 위원의 30 이상이 되도록 하여야 한다.	② ---------------------------- 이상의 위원으로 구성하여야 --------------------------------------------------.
③ 위원회의 위원장은 기획조정관으로 하고, 내부위원은 과장급, 외부위원은 기상청 용역사업과 관련하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람으로 구성한다. 단, 위원장이 참석하지 못한 경우에는 해당 위원회에 참석한 위원 중 호선하여 그 직무를 대행할 수 있다.	③ ------------------------------- 위원은 과장급------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
⑤ 위원장은 위원회의 효율적인 운영을 위해 간사 1명을 두되, 간사는 연구개발담당관이 된다.	⑤ 위원회----------------------------------------------------------------.
⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
<신 설>	⑦ 위원회의 회의에 부칠 추진계획서의 중복성 점검을 위하여 연구용역 사전검토실무반을 둔다.
<신 설>	제4조의2(연구용역 사전검토실무반) ① 연구용역 사전검토실무반(이하 “사전검토실무반”이라 한다)은 반장 1명을 포함하여 6명 이하의 반원으로 구성한다. ② 사전검토실무반의 반장은 연구개발담당관으로 하고, 반원은 사무관(연구관) 이상의 소속공무원을 예보ㆍ관측ㆍ기후ㆍ지진화산ㆍ융합기상 등의 분야에 대한 중복성 점검 책임위원으로 지정하여 구성한다. ③ 사전검토실무반은 차년도 추진계획서에 대해 연구내용의 중복성 및 추진방법ㆍ일정의 적정성을 검토하고, 그 결과를 위원회의 추진계획서 심의 시에 보고하여야 한다. ④ 사전검토실무반은 추진계획서를 검토 후 수요부서의 장에게 수정ㆍ보완을 요청할 수 있다.
제5조(추진계획서 제출) ① 수요부서의 장은 사업개시 전년도 12월 말까지 추진계획서(별지 제1호 서식)를 작성하여 연구개발담당관에게 제출하여야 하며, 연구개발담당관은 미흡한 사항 등을 보완하여 위원회에 안건으로 상정하고 1월말까지 심의하여야 한다.	제5조(추진계획서 제출) ① 수요부서의 장은 사업개시 전년도 11월 말까지 추진계획서(별지 제1호서식)를 작성하여 연구개발담당관에게 제출하여야 한다.
② 수요부서의 장은 추진계획서 제출 시 연구관리시스템과 과학기술정보통신부에서 운영하는 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr)를 통하여 해당 용역과제와 기존 연구개발과제와의 중복성을 사전에 검토하여, 검토 결과 유사한 기존 연구개발과제가 있는 경우에는 차별성 검토보고서(별지 제2호 서식)를 별도로 제출하여야 한다.	② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(별지 제2호서식)-----------------------.
제6조(추진계획서 심의) ①ㆍ② (생 략)	제6조(추진계획서 심의) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 연구개발담당관은 위원회의 추진계획서 심의 결과를 수요부서의 장에게 통보하여야 하며, 수요부서의 장은 심의결과를 추진계획서에 반영하여야 한다.	③ ---------------------------------- 결과를 12월 말까지 수요부서-----------------------------------------------------------.
④ 수요부서의 장은 제5조제1항 및 제6조제2항의 규정에도 불구하고 추가수요 발생, 확정된 용역과제의 중요사항 변경 등이 필요한 경우 추가 심의사유 및 변경내용과 함께 추진계획서를 제출하고 심의 요청을 하여야 한다.	④ ------------------------ 제3항--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)
제7조(연구자의 선정) 수요부서의 장은 제6조에 따라 확정된 용역사업의 연구자 선정을 위한 계약에 관한 기본 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 추진하여야 한다. 다만, 제안서 평가를 위한 평가위원회는 제8조와 같이 구성하여 운영하여야 한다.	제7조(연구자의 선정) --------------------------------------------------------------------------- 국가계약법---------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------.
제8조(평가위원회 구성ㆍ운영) ① 수요부서의 장의 용역사업의 효율적인 운영을 위하여 평가위원회를 구성하여 운영한다.	제8조(평가위원회 구성ㆍ운영) ① -------- 장은 ------------------------------------------------------.
② 평가위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상의 위원으로 구성하되, 외부위원은 과반수를 포함한다.	② ---------- 위원장 1명-------------------------------------------------------.
③ ∼ ⑥ (생 략)	③ ∼ ⑥ (현행과 같음)
제9조(용역과제의 점검 및 평가) ① 수요부서의 장은 용역사업 계약이 체결된 후 5일 이내에 용역과제 체결현황을 작성하여야 한다.	제9조(용역과제의 점검 및 평가) <삭 제>
② 수요부서의 장은 용역과제 수행 중 1회 이상 진행상황에 대한 중간점검을 실시하여야 한다. 단, 연구기간이 2개월 이하이거나 사업비가 3천만원 이하인 경우에는 점검을 생략할 수 있다.	② --------------------------- 사업수행연도에 1회 ----- 용역사업 진행상황 점검(별지 제4호서식)--. -------------------- 2천만원 --------------------------------.
③ 계약상대자는 용역과제가 완료되기 15일 전까지 결과보고서를 수요부서의 장에게 제출하여 결과평가를 받아야 하며, 보완요구사항을 반영한 최종보고서를 계약종료일까지 제출한 후 검사를 요청하여야 한다. 완료된 최종보고서는 기상청 도서관에 1부 제출하여야 한다.	③ ---------------------------------------------------------------------- 용역과제 평가결과서(별지 제5호서식)-------- 최종보고서(별지 제7호서식)를 ---------------------------. <후단 삭제>
④ 수요부서의 장은 용역과제 종료 된 다음연도 4월 30일까지 활용결과보고서를 작성하여야 한다.	④ 장기계속계약의 경우, 제3항에 따라 사업수행 연차별 보고서(별지 제7호서식)를 제출하여야 한다. 다만, 최종년도 보고서는 완료보고서로 갈음한다.
<신 설>	⑤ 장기계속계약이 중단될 경우, 해당 연도까지의 최종보고서를 제출하여야 한다.
<신 설>	⑥ 완료된 최종보고서는 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 「기상청 간행물 발간등록 및 납본 가이드」에 의거 제출하여야 하며, 최종보고서 전자파일을 기상청 전자도서관에 등록하여야 한다.
<신 설>	⑦ 수요부서의 장은 해당연도의 용역과제가 종료된 다음연도 4월 30일까지 활용결과보고서(별지 제6호서식)를 작성하여야 한다.
제10조(연구관리시스템 등록의 의무) 수요부서의 장은 다음 각 호의 사항을 기간 내에 반드시 연구관리시스템에 등록하여야 한다.	제10조(연구관리시스템 등록의 의무) ------------------------------------------------------------------------.
1. 제9조제1항에 따른 용역사업 체결현황(별지 제3호 서식)	1. 제3조의2제4항에 따른 용역사업 체결현황(별지 제3호서식)
2. 제9조제2항에 따른 용역사업 진행상황 점검결과서(별지 제4호 서식)	2. --------------------------------------(별지 제4호서식)
3. 제9조제3항에 따른 평가결과서(별지 제5호 서식) 및 최종보고서(별지 제7호 서식)	3. 제9조제3항에 따른 평가결과서(별지 제5호서식) 및 최종보고서(별지 제7호서식)
4. 제9조제4항에 따른 활용결과보고서(별지 제6호 서식)	4. 제9조제7항에 따른 활용결과보고서(별지 제6호서식)
제4장 보칙	제4장 보 칙
제11조(연구성과의 소유) 용역과제의 수행결과로 얻어지는 지식재산권 및 연구보고서의 판권 등 직ㆍ간접적인 연구성과에 대한 일체의 권리는 기상청 소유로 한다. <단서 신설>	제11조(연구성과의 소유) ------------------------------------------------------------------------------------------- 공동소유---------. 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 경우 이를 제안요청서에 명시하여야 한다.
제12조(법령 등의 적용) 용역과제의 계약방법, 계약체결 및 이행, 대가지급 등 계약에 관한 전반적인 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「계약예규 용역계약일반조건」, 「계약예규 협상에 의한 계약체결기준」, 「계약예규 정부입찰ㆍ계약 집행 기준」, 「기상청 세출예산 운영 및 집행지침」 등을 적용한다.	제12조(법령 등의 적용) --------------------------------------------------------------- 국가계약법-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.