(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 6. 5(목) - 2008. 6.11.(목)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 6. 11.(목) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 지구환경위성과 허성회(전화 02-2181-0834)

4. 제안서 제출 : 지구환경위성과 허성회(전화 02-2181-0834)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 지구환경위성과에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의시담을 통한 수의계약으로 진행함.

비전 『World Best 365』

비전 『World Best 365』

지구관측위성 수신 장비 이전․설치

용역 규격서

2008. 6.

기상기술기반국 지구환경위성과

『하늘을 친구처럼, 국민을 하늘처럼  』

용역 규격서

정부물품 분류번호	품목번호	품명(사업명)	단위	수량
-	1	지구관측위성 수신 장비 이전․설치	식	1

1. 일반사항

1.1 개요

1.1.1 본 규격서는 대전지방기상청 문산기상대에 설치되어 기상청 기상기술기반국  지구환경위성과에서 운영하고 있는 X-밴드 지구관측위성(Terra/Aqua)수신분석시스템 이전․설치 및 정지궤도위성(Meteosat)수신분석시스템을 충북 진천에 위치한 국가기상위성센터로 이전․설치하기 위하여 최소한의 요건을 정한 것이다.

1.2 사업기간

1.2.1 사업기간 : 계약 후 42일(6주)

1.3 장비 해체 및 이전․설치 장소(소재지)

구분	장비 해체 장소	장비 이전․설치 장소
기관명	대전지방기상청 문산기상대	기상청 기상기술기반국 지구위성환경위성과 국가기상위성센터
주소	경기도 파주시 문산읍 운천리 103-17번지	충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 산 25-168

2. 사업 대상 장비 현황

구분	장비명	사업내용	물품명	규 격	수량
1	Terra/Aqua 안테나 및 RF장비일체 (안테나, 돔, 제어기, 수신기 등)	이전/설치	안테나(3.6m), 안테나돔(4.2m)	SeaSpace (S/N:97001021)	1
			수신기(receiver)	Alcate (S/N:2K45/021)	1
			무정전전원장치 2,200VA	APC (S/N:F290)	1
			DAT Driver(DDS-3)	Ultra AX-HP (S/N:F344)	1
			DLT Driver(35/70GB)	Tandberg (S/N:F293)	1
			허브(8Port)	REPOTEC (S/N:RT1708K)	1
2	수신 및 전처리서버 (tsws11)	이전/설치	소형컴퓨터 (DISK RAID 포함)	Ultra-SUN, 400MHz (2006.12 Linux로 upgrade)	1
3	자료처리서버 (tsws13)	MODIS 자료처리 프로그램 및 데이터 이전	소형컴퓨터	Pentium4 2.4GHz RAM 1GB	1
4	스토리지 (RAID)	스토리지 및 데이터 이전	디스크 어레이	Terra/Aqua 부대품	1
5	Meteosat 안테나 및 RF장비 일체(안테나, 제어기, 수신기 등)	이전	안테나(3.1m)	트랙형	1
			Frame Synchronizer Board	F-00067-134	1
			PDUS Receiver	HR-300	1
			안테나제어기	FR//RCE2KR-3 (S/N:7127)	1
6	수신 및 전처리서버 (tsws2)	이전	소형컴퓨터	Ultra-SUN 200MHz Model 1200	1
계					14

3. 지구관측위성(Terra/Aqua) 이전․설치

3.1 현재 지구관측위성(Terra/Aqua) 장비 및 자료수집처리 체계도

3.1.1 지구관측위성(Terra/Aqua) 장비 (설치장소 : 문산기상대)

안테나 레이돔	안테나 시스템	수신처리시스템

3.1.2 지구관측위성(Terra/Aqua) 수신 자료수집처리 체계도

3.2 이전 후 설치장소 (국가기상위성센터)

안테나 및 레이돔 설치장소	수신시스템 및 서버 설치장소 (2층 전산장비실)

3.2.1 이전․설치 후 지구관측위성(Terra/Aqua) 시스템 구성도

3.3 지구관측위성(Terra/Aqua) 기술사항

3.3.1 장비 해체 및 이전․설치

3.3.1.1 기존 설치된 레이돔(4.2m)을 분리 해체하여 이동한 후 재 조립하여야 한다.

3.3.1.2 기존 안테나(3.6m)를 분리 해체하여 이동한 후 재 조립하여야 한다.

3.3.1.3 수신시스템과 수신서버 등은 신제품 서버 랙(rack)에 장착되어야 한다.

3.3.1.4 기존 안테나케이블 및 GPS안테나케이블은 신제품으로 교체 설치하여야 한다.

3.3.1.5 수신시스템 및 서버 등 각종 노후화된 통신케이블(커넥터 포함) 및 전원케이      블(접지용 멀티콘센트 등)은 신품으로 교체하여야 한다.

3.3.1.6 안테나와 수신시스템까지 연결되는 각종 케이블은 전선 보호관을 사용하되       전원케이블과 통신케이블을 분리하여 설치․포설하여야 한다.

3.3.1.7 안테나 기초대의 앵커볼트는 작업도면에 따라 설치하되 접착력이 우수한 제  품으로 사용하여야 한다.

3.3.1.8 안테나 Radome 조립 시 강한 바람(60m/s 이상)으로 파손 및 훼손이 되지 않  도록 견고하게 설치하여야 하며, 방수처리를 완벽하게 하여야 한다.

3.3.1.9 안테나는 리플렉터, 피드 혼, 다운컨버터, LNA, 포지셔너를 분리 해체하여,   안전하게 이동한 후 재 조립하여 안테나 밸런스를 재조정하여야 한다.

3.3.1.10 안테나 수신시스템 설치 완료 후 Antenna align을 실시하여야 한다.

3.3.1.11 수신시스템과 수신서버는 해체 및 이전․설치 시 동작 상태를 확인하여 원  상태로 복원되어야 한다.

3.3.1.12 이전작업 완료 후, 안테나가 자동으로 Terra/Aqua 위성을 추적하여 데이터  가 정상적으로 수신되어야 한다.

3.3.1.13 낙뢰로부터 일정 공간을 보호하기 위한 낙뢰보호설비는 피뢰접지시스템과 장비접지 시스템으로 구성되며, 피뢰접지시스템은 피뢰침, 피뢰도선, 접지시스템으로, 장비접지시스템은 장비접지선과 접지시스템으로 구성하여야 한다.

3.3.1.14 낙뢰보호설비는 정보통신공사업법 규정에 따라 정보통신공사업 면허를 가진사업자가 수행해야 한다. 입찰업체는 입찰제안서의 제출 시에 정보통신공사 면허증 사본을 제출하여야 한다.

3.4 장비 해체 후 방수 시공

3.4.1 문산기상대 청사 옥상에 설치된 안테나 및 레이돔 해체 후 고정 받침대 부분의 마무리 작업 시 건물 내부로 누수되지 않도록 방수공사를 시행하여야 한다.

3.5 설치 및 시험 검사

3.5.1 계약상대자는 공사완료 후 안테나 동작여부, 수신기 동작상태, 데이터 갱신상태, 스케쥴러 동작상태, 보조데이터(ancillary data) 수신상태 등을 시험 검사하고 그에 대한 증빙자료를 제출하여야 한다.

3.5.2 설치 후 시험운영 중 오동작 및 미비점들을 발견하는 경우 시험운영이 중단  되며, 계약상대자는 이를 보완 후 해당 항목부터 재 시행 하되 앞서 완료한 시험항목이 관련되어 있는 경우에는 관련 시험 항목부터 재시행해야 한다.

3.5.3 계약상대자는 이전․설치 시 제공될 신제품인 안테나케이블의 제품인증서 및      제작사 시험 성능 성적서 등 증빙자료를 제출하여야 한다.

3.5.4 낙뢰보호설비 설치 후 저항값을 측정․기록하여 검사요청 시 증빙서류로 제출하여야 한다.

3.5.5 계약상대자는 장비 설치 완료후 시험검사 시행 7일전 기상청에 사전 통보하     여야 한다.

3.5.6 계약상대자는 장비 설치 완료후 시험 검사 후 일주일간 수신한 Terra-1,         Aqua-1 위성의 RGB 합성자료 출력물을 제출하여야 한다.

3.5.7 장비 설치․검사 시험은 기상청 감독공무원과 계약상대자 측 기술자가 공동     으로 시행하며, 모든 항목별 시험 결과에 대하여 양측이 확인하고 서명하여야    한다.

4. 정지궤도위성(Meteosat) 장비 이전

4.1 이전 대상 장비

안테나 (문산기상대)	수신 시스템 및 서버 (문산기상대)

4.2 기존 설치된 안테나(3.1m)를 분리 해체하여 국가기상위성센터(진천)로 이동한 후 지정한 장소에서 재 조립하여야 한다.

4.3 안테나 기초대의 앵커볼트는 설치하되 접착력이 우수한 제품으로 사용하여야 한다.

4.4 안테나 조립 시 강한 바람(60m/s 이상)으로 파손 및 훼손이 되지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

4.5 이전작업 완료 후에는 이설전의 동작상태와 동일해야하며 안테나 정상작동 유무를 확인해야 한다.

4.6 수신 시스템 및 서버 등을 분리 해체하여 국가기상위성센터(진천)에 이동한 후 지정한 장소에서 안테나시스템과 연결한 후 장비 가동상태가 정상인가를 확인하여야 한다.

5. 입찰요건

5.1 입찰자격 요건

5.1.1 입찰자는 본 사업 특성 상 위성지구국 송․수신 설비의 설치 및 시험에 관한 고도의 기술과 경험이 필요하므로 최근 10년 내에 본 공사 대상장비 동등급 이상의 위성지구국 안테나를 건설하고 시험을 시행하여 공인을 획득한 경험이 있어야 한다.

5.1.2 입찰자는 기상위성(정지궤도 또는 극궤도) 수신서버의 설치 및 운용 경험이 있어야 한다.

5.1.3 입찰자는 장비 이전 후 발생 할 수 있는 시스템 이상에 대하여 본 공사 대      상장비의 제작사로부터 기술지원을 받을 수 있어야 한다

5.2 입찰서 제출 유의사항

5.2.1 입찰서 본문은 간단명료한 표현으로 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

5.2.2 제안사는 입찰서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

5.2.3 입찰자는 입찰 전 시스템 시설예정지인 국가기상위성센터의 현장 조사를 실      시하지 않고는 입찰에 응할 수 없다. 반드시 현장조사를 수행하여 사업담당      자가 확인한 아래의 “현장조사 확인서”등을 받아 입찰시 제출하여야 한다.

5.2.3.1 시설을 수용할 장소

5.2.3.2 공사용 자재 보관 장소

5.2.3.3 상용 전원공급

5.2.3.4 네트웤 사용(Network access)

5.2.3.5 모든 공정을 포함한 설치작업에 있어서의 입찰사 담당 입회

5.2.3.6 기타 협의 사항

5.2.4 입찰서 제출은 기상청 제출용 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 3부를 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

5.3 입찰서 구성 및 세부 작성요령

I. 제안사 소개

1. 회사 소개

○ 제안사 소개를 기술

2. 회사 연혁

○ 제안사의 주요연혁을 기술

3. 회사 현황 및 매출액 추이

○ 현재의 사업 현황 기술

○ 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

○ 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

○ 기술자의 기술자격증 보유 현황과 경력 등의 인적사항을 제시

5. 주요 사업 영역

○ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

○ 사업부문의 사업실적을 기술

II. 장비납품 실적 및 장비유지보수 실적

1. 장비납품 실적

○ 관련 장비 납품 실적으로 유사장비 납품한 사례가 있어야 하며, 이에 대한 증빙자료를 제출

2. 장비유지보수 실적

○ 관련 장비 유지보수 실적으로 유사장비를 유지보수한 사례가 있어야 하며, 이에 대한 증빙자료를 제출

III. 제안 배경

1. 제안 목적과 범위

○ 기상위성장비의 이전 설치보수를 위한 사항 설명

2. 구성 및 검토

○ 위성수신장비의 환경을 도식하고 장비유지보수를 위한 검토사항을 설명

IV. 제안 장비유지보수

1. 제안 장비유지보수 개요

○ 효율적인 장비유지보수 방안을 제시

2. 제안 장비유지보수 방법

○ 정비보수 인원의 경력 및 자격증, 교육실적 제시

○ 예비장비 보유량 제시, 지원 대책 제시

V. 향후 지원 대책

○ 향후 장비보수관련 지원 대책을 제시

5.4 입찰 및 낙찰자 결정방식

5.4.1 입찰 및 낙찰자 결정방식

5.4.1.1 결정방식 : 일반경쟁

5.4.2 세부평가방법

5.4.2.1 입찰서 기술평가를 실시하여 종합 평가점수를 산출한다.

5.4.2.2 입찰서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체 중에서 기      술 적격 업체를 선정하며, 평가결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로      한 다.

5.4.3 기술평가표

항 목	세 부 평 가 항 목	배점	비 고
o 입찰(제안)서 내용의 충실도(10점)	o 입찰서 작성형식의 명확도(5점) o 입찰서 내용의 명확도(5점)	10
o 공고 규격서와 입찰(제안)서의 일치성 (10점)	o 업무이해의 정확도(5점) o 공고 규격서 와의 일치성(5점)	10	일반사항, 구성요소, 기술사항, 부(속)품, 기타요구사항 등
o기술사항(규격) 의 적합성 (60점)	o 장비이전설치 능력의 충족도 (동급 이상의 장비 설치사업 또는 유지 보 수 실적증명원 제시)	20	객관성을 입증할 수 있는 관련증빙자료 및 설명자료 등을 근거로 평가함.
	o 운용요구의 충족도 - 위성장비관련 기술 및 인원 보유 여부 (위성장비 전공자 또는 위성장비 관리 유경험자 1인 이상, 전자 또는 통신 관 련 산업기사 2인 이상)(10점) - 예비 물품(각종 RF부품 1대 이상) 보유 량(5점) - 위성기지국 구축 사업 및 유지보수 관련 참여 경력(10점)	25
	o 장비유지보수 이행방법 및 절차의 타당성	15
o 제안서 및 규 격서 만족도 (10점)	o 본 규격서에서 입찰(제안)사항을 증빙 또 는 설명할 수 있는 각종 자료의 만족도	10
o 기술지원 능력 (10점)	o 동등 또는 유사기술 지원실적	10	기술을 증명할 수 있는 자료
합 계		100점

비전 『World Best 365』

지구관측위성 수신 장비 이전․설치

공사시방서

2008. 5

기상기술기반국 지구환경위성과

『하늘을 친구처럼, 국민을 하늘처럼  』

Ⅰ. 공사설명서

1. 공사명 : 지구관측위성 수신·분석 장비 이전·설치

2. 개 요 : 현재 대전지방기상청 문산기상대에서 설치 운영 중인 X-밴  드 지구관측위성(Terra/Aqua)수신․분석 및 정지궤도위성(Meteosat)수신․분석 장비를 충북 진천 국가기상위성센터(가칭)로 이전·설치하는 공사임

3. 장  소 :

ㅇ 이설 전 : 문산기상대

(주소 : 경기도 파주시 문산읍 운천리 103-17번지)

ㅇ 이설 후 : 국가기상위성센터

(주소 : 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 산 25-168)

4. 이설 전 공사 수행 사항

가. 해체 대상 장비 내역

번호	해체장비 내역		현재 위치	수량
1	Terra/Aqua	안테나레이돔(4.2m)	청사 옥상	1식
2		안테나(3.6m)	〃	〃
3		수신장비 (제어기, 수신기 등)	1층 위성장비운영실	〃
4		서버(수신/ 전처리서버) 및 스토리지	〃	〃
5		각종 통신 및 전원 케이블	청사 옥상 및 1층 위성장비운영실	〃
6	Meteosat	안테나(3.1m)	안테나 노장	〃
7		수신 시스템 및 서버	1층 위성장비운영실	〃
8		각종 통신 및 전원 케이블	1층 위성장비운영실	〃

나. 기타 공사

(1) 문산기상대 청사 옥상에 설치되어 있던 안테나, 레이돔 해체 후  기초대 바닥 부문 방수 공사 수행

(2) 문산기상대 1층 위성장비운영실의 잔여 장비 재 배치 및 청소

(3) 문산기상대 청사 옥상 및 1층 위성장비운영실의 해체 공사 수행  중 발생된 부산물 처리

다. 기존 장비 사진

(1) 지구관측위성(Terra/Aqua) 장비

안테나레이돔	안테나시스템	수신·분석 시스템

(2) 정지궤도위성(Meteosat) 장비

안테나 (문산기상대)	수신 시스템 및 서버 (문산기상대)

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총칙

가. 본 공사는 지구관측위성(Terra/Aqua)수신장비 및 정지궤도위성  (Meteosat) 이전․설치공사로써 법령 또는 별도의 규정에 의한 것 이외는 본 시방서에 따른다.

나. 본 공사에 적용될 법령 또는 별도로 정한 규정은 다음과 같다.

(1) 전기통신기본법

(2) 전기통신사업법

(3) 전기통신공사업법

(4) 전파법

(5) 전기용품안전관리법

(6) 공산품품질관리법

(7) 소방법

(8) 직업안정법

(9) 기타 본 공사와 관련된 관계 표준공법

2. 일반시방서 및 특별시방서

일반시방서는 본 공사를 시행함에 있어 일반적인 계약조건과 자재,

공법 등에 관한 기술적인 사항을 규정한 것이며, 특별시방서는 본 공

사만의 특별사항을 규정한 것이다.

3. 현장 지휘 감독자

가. 계약자는 공사현장에 정보통신관련 고급이상 또는 유선/무선 설비기사 1급 이상의 자격 소지자를 현장 지휘 감독자로 선정하여 작업시 공사현장에 투입시켜야 한다.

나. 계약자는 감독공무원의 요청이 있을 경우 현장 지휘 감독자를 교     체토록 한다.

4. 발생 부산물

공사수행 도중 발생된 부산물은 감독공무원의 지시에 따라 정리 및 반출해야 하며, 발생 부산물 조서를 첨부하여 감독공무원에게 제출하여야 한다.

5. 공사현장 관리

가. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공     사가 있을 경우 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야      한다.

나. 이설작업 중 감독공무원 및 발주처의 허가 없이 교통에 방해가      되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠만한 시공행위는 금한다.

다. 공사현장에 일반인 및 노무자의 출입을 통제하고 감시, 풍기, 위     생, 화재, 도난 및 그 밖의 사고방지에 대하여 특히 유의해야 한     다.

라. 공사장 및 그 부근의 지상, 지하의 각종 시설물과 기존 운용중인     통신장비 혹은 회선 등에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 이와 관     련된 사고는 전적으로 계약자의 부담으로 원상복구 및 변상을 하     여야 한다.

6. 장비 및 공기구

장비 및 공기구는 소요량 이상을 확보해야 하며, 항상 소정의 기   능을 유지하여야 한다.

7. 기기 및 자재 반입/반출

가. 공사 관련 기기 및 자재는 현장 반입 전에 감독공무원에게 보고     해야 하며, 품질 및 수량에 대한 검사를 받아야 한다.

나. 반입 시 파손 및 훼손된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후      재 반입하고 이를 검사받아야 한다.

다. 다만, 경미한 고장이나 손괴된 부분이 있는 경우로써 현장에서      보수가 용이한 경우에는 감독공무원에게 승인을 득하고 현장에서     보수할 수 있다.

라. 또한, 운반 중에 도금이 벗겨진 경우에는 현장 도착전후 재 도장     하여 부식을 방지하여야 하며, 기능의 저하나 수명단축이 발생치     않도록 계약자 책임 하에 철저히 보관해야 한다.

8. 안전 조치

가. 공사 수행 시 항상 호우, 풍랑 등 악기상 및 특보에 대한 기상예     보를 충분히 숙지하며, 유사시에는 피해를 최소화 하는 응급조치     를 해야 한다.

나. 공사에 필요한 안전수칙을 이행해야 하고, 필요한 제반시설을       갖추어야 한다.

다. 공사 수행 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손, 훼손 등

보관에 주의하여야 하며, 위험물 또는 인화성 자재에 대해서는 방     화안전대책(소화기 설치 등)을 강구하여야 한다.

라. 공사 착수 전에 보안시설을 해야 할 사항은 일반적으로 다음과     같다.

(1) 출입금지 구역의 설정

(2) 기존 시설에 대한 보호

마. 작업장내에서는 항상 안전화, 안전모, 안전벨트 등 필요한 안전조     치를 취하고 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

바. 공사 현장에는 비상 구급약을 상비하여야 한다.

사. 공사 시공 중에는 인접해 있는 기설 구조물 또는 설비 등에 피해     를 줄 우려가 있는 경우에는 적절한 보호설비를 하여야 한다.

9. 사고의 보고 및 책임

공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치 후 감독 공무원에게 보고하여야 하며, 공사도중 발생한 일체의 인적, 물적 등의 사고 및 피해에 대하여는 계약자가 모든 책임을 져야 한다.

10. 제 법규의 준수

가. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해      구호법, 기타 관련 제 법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

나. 노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 계약자의 책임 하에 이루어져야 하고, 사역하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

11. 작업시간

가. 공사수행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또  는 휴일에 작업을 할 때에는 사전 감독공무원의 승인을 득해야 한다.

나. 시설공사를 계속 추진함에 있어 형편에 따라 작업시간의 연장,      단축 또는 야간작업의 필요가 있을 때는 감독공무원에게 보고       하고 그 지시에 따라야 한다.

12. 공사 후의 정리

매일 공사마무리 작업 시에는 주변의 정리(청소)를 철저히 하고    자재의 도난 등을 방지하기 위해 적절한 조치를 취하여야 한다.

13. 물자관리

가. 계약자가 부담하는 기기 및 장치와 지입자재는 전기사업법에 따     른 전기용품안전관리법, KS, 공산품품질관리법, 그 밖의 준용기준     에 적합한 제품으로 사용하여 제 조건을 만족하여야 한다.

나. 검사 및 시험에 합격한 자재라도 사용할 때 명확하게 변질 또는     불량품으로 판정되면 이를 교환하여 재시공하여야 한다.

다. 감독공무원은 필요시에는 자재의 품질 또는 특성시험을 명할 수     있으며, 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 일반사항

본 기술지침은 지구관측위성(Terra/Aqua)장비 및 정지궤도위성  (Meteosat)이전․설치 전반에 대한 지침으로서 계약상대자는 다음 사항에 중점을 두어야 한다.

가. 본 공사 대상장비의 이전 목적과 필요성에 대해서 중점이 되는 사   항들은 명확히 하여야 한다.

나. 기존에 운영중인 지구관측위성(Terra/Aqua)장비 이전․설치 시, 신뢰성, 기능성, 경제성, 확장성, 보완성을 고려하여야 한다.

다. 기존 장비 이전 후 발생할 수 있는 장애를 대비하여 장비 제작사    의 기술지원을 받을 수 있어야 한다.

라. 기존 문산기상대에 설치 운영중인 지구관측위성(Terra/Aqua)장비    등을 충북 진천 국가기상위성센터로 이전․설치하여 이설 전의      정상 가동 상태로 원상 복구하여 사업 기일 내에 정상 운영될 수    있도록 하여야 한다.

마. 기존 문산기상대에 설치 운영중인 정지궤도위성(Meteosat) 수신     장비 등을 충북 진천 국가기상위성센터로 이전하여 이설 전의 정    상 가동 상태를 유지 하여야 한다.

바. 본 공사 대상장비와 타 장비와의 연계 운영되는 기능을 면밀히 분석하여 전체적인 성능에 이상이 없도록 하여야 한다.

사 건축, 기계, 전기․통신 및 기타 관련분야와 긴밀히 협의하여 적정  한 이설공사가 되도록 하여야 한다.

아. 각종 전원 및 통신케이블의 전선보호관 포설 시 타 장비에 영향     을 주지 않도록 하여야 하며, 향후 확장을 고려하여야 한다.

자. 배관/배선 이격거리에 따라 전송손실을 최소화하도록 최단거리로    하되 EMI/EMC 대책 등을 고려하여야 한다.

차. 모든 기술 수준은 관계법령에 따르며, 신기술, 신공법을 적용할 경   우 관련 근거를 제출하도록 하여야 한다.

카. 안테나레이돔 및 안테나는 기초, 풍압하중을 고려한 전반적인 설    치조건과 운영관리상의 장․단점 등을 비교 검토하여 시공계획서    작성 제출 및 승인을 득한 후 실시 설계하여야 한다.

2. 공사 범위

가. 본 공사 수행사항

번호	이설 장비 내역		수량	위치(계획)
1	Terra/ Aqua	안테나레이돔	1식	안테나 노장
2		안테나(3.6m)	〃	〃
3		수신장비 (제어기, 수신기, 랙 등)	〃	2층 전산장비실
4		서버(수신/ 전처리서버) 및 스토리지	〃	〃
5		각종 통신 및 전원 케이블 (보호관포함)	〃	해당구역
6		수신장비와 서버간의 전원․통신 접지선 포설	〃	〃
7		수신장비와 서버간의 각종 통신 및 전원케이블 커넥터 등 결선	〃	〃
8	Meteosat	안테나(3.1m)	〃	안테나 노장
9		수신장비(제어기, 수신기, 랙 등)	〃	2층 전산장비실
10		수신장비와 서버간의 각종 통신 및 전원케이블 커넥터 등 결선	〃	해당구역

나. 기타 수행사항

(1) 이전․설치 후 각 장비에 대한 작동상태와 종합시험 검사 실시

(2) 랙 및 장비 배치에 맞추어 각종 케이블 포설 시 노출되지 않도      록 덕트(steel duct) 등의 부자재를 활용하여 정리

(3) 안테나 설치 부지 및 위성센터 2층 장비실간의 이전․설치 공사      수행 중 발생된 부산물 처리 및 청소

3. 계획성

가. 장비 이전 구성도 및 계통도

계약자는 지구관측위성(Terra/Aqua)장비 정지궤도위성(Meteosat)장비 이전․설치 계획 및 전체 설계 지침 등을 고려하여 아래의 장비 구성도 및 계통도를 제시하여야 한다.

(1) 포함 장비 : 수신장치/수신서버/전원․통신관로/접지관로

(2) 도면 작성 : A4 이상

(3) 구성 범위 : 이전․설치 장비 구성도 및 계통도

나. 장비 배치 계획

(1) 본 공사는 시방서에 명시되어 있는 제반시설이 충분하고 최적의      장비성능을 발휘하도록 착공 전 공사 전반에 대한 세부 설계 구      성도, 제작도, 시공계획서, 공정표 등을 작성하여 감독공무원에게      제출하여 승인을 득한 후 계획일정에 따라 시공이 되어야 한다.

(2) 다만, 본 시방서에 명시되지 않는 사항에 대해서는 감독공무원과      긴밀히 협의하여 처리하여야 한다.

(3) 장비 설치 위치는 현장 담당공무원과 협의하에 본 공사 대상장      비와 타 장비와의 상호 간섭 영향이 없는 연계운영을 고려하여      설계하여야 하며, 장비운영자가 운영이 용이하고 향후, 유지보수      가 원활하도록 배치·설치하여야 한다.

다. 이전․설치 시 요구사항

(1) 이설 전, 감독자의 입회하에 장비가동상태에 대하여 정밀점검을      하여야 한다.

(2) 장비가동 정밀점검 시 각 장비들의 문제점이 발견된 부분은 감      독관 입회하에 공동 확인 후 수리여부를 결정하여야 하며, 원칙      적으로 이전․설치 완료 이전에 수리하여야 한다.

(3) 안테나 및 레이돔 이전․설치에 필요한 자재, 차량, 인원 및         방법 등 공정계획을 작업 전 제출하여 감독공무원의 승인을 득      해야 한다.

(4) 장비가동 상태 정밀점검이 완료되면 즉시 장비를 해체하여 이       전(운송)이 용이하고 충격․진동에 의해 파손이 되지 않도록 포      장하여야 한다.

(5) 각 장비별 운송이 완료되면 설치 지정 장소의 장비 배치는 현장      감독자의 지시에 따라 설치하여야 한다.

(6) 이전․설치 시 최적 구성방안 및 변경 사항에 대해서는 사전        에 감독자에게 서면으로 보고하고 승인을 득하여야 한다.

(7) 장비 배치에 맞춰 각종 케이블 및 전선 보호관은 외부에 직접적      으로 노출되지 않도록 덕트(steel duct)등의 부자재를 활용하여       깔끔하게 정리하여야 하며, 타 시스템 가동에 영향을 주지 않도      록 하여야 한다.

(8) 각종 케이블은 꼬임이 없고 견고하게 포설하고 기기장치 상단부

에 조임틀을 부착하여 미려하게 정리한다.

(9) 장비운영에 지장이 없도록 설치 구성도에 따라 정확하게 구성       하며, 장비 설치 시 발생한 부산물에 대한 청소도 병행하여야        한다.

(10) 공사 수행 과정 전반과 시공종별 또는 계약자가 제공(반입)하는      기기 및 자재에 대하여 사진촬영을 하고, 사진첩 등에 설명을 기

입 정리하여 감독공무원에게 제출하여야 한다.

(11) 장비 이전․설치 완료 후 종합적인 장비 성능 시험 검사를 수행하고 그 결과를 감독자에게 서면으로 증빙자료를 제출하여야 한다.

(12) 안테나 및 레이돔과 각종 장비 이전․설치 시 부주위로 인한       사고, 건물훼손 등 손해비용은 계약자가 모든 책임을 져야 한다.

4. 시공성

가. 지구관측위성(Terra/Aqua) 안테나 부

(1) 안테나레이돔(4.2m)의 기초, 풍압하중을 고려한 적합한 구조로 견고하게 장착되어 인위적 또는 자연적인 흔들림이나 진동에 견딜 수 있어야 하며, 조립시 누수 및 결로가 발생하지 않도록 이설하여야 한다.

(2) 안테나 기초대의 앵커볼트는 작업도면에 따라 설치하되 부식된       볼트/너트는 재사용치 말고 접착력이 우수한 신제품으로 사용하      여야 한다.

(3) 기존 안테나케이블 및 GPS안테나케이블은 노후화에 따라 철거하       고, 설치 현장의 안테나 부지와 시스템실 구간 등을 고려한 케이       블 길이에 따른 성능이 인증된 신제품으로 설치/시공하여야 한        다.

(4) 계약자는 설치 시 제공되는 신제품인 케이블에 대한 제품인            증서 및 제작사의 시험․성능성적서 등을 증빙자료로 제출하여        야 한다.

(5) 안테나 부지와 장비운영실간의 접속 케이블은 기존 연결 상태를      정확히 파악하여 작동에 지장이 없도록 이격거리 등을 고려하여      설치/시공하여야 한다.

(6) 안테나는 리플렉터, 피드 혼, 다운컨버터, LNA, 포지셔너 등을 재 조립하고 안테나 밸런스를 재조정하여 맞추어야 한다.

(7) 안테나 수신장치 설치 완료 후 안테나 조정(antenna align)을 실    시하여야 한다.

(8) 안테나가 자동으로 위성(Terra/Aqua)을 추적하여 데이터가 정상      적으로 수신되도록 하여야 한다.

(9) 안테나부 및 수신장치/수신서버, 케이블 및 전선보호관 등은 외      부환경에 견딜 수 있도록 필요한 조치를 취하여 설치/시공하여      야 한다.

(10) 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사      부분은 반드시 감독공무원의 입회하에 시공하여야 하며, 공사수      행 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명 기입 정리하여 제출하여      야 한다.

나. 정지궤도위성(Meteosat)장비 안테나 부

(1) 안테나(3.1m)를 지정한 장소에 재 조립하여야 한다.

(2) 안테나 기초대의 앵커볼트는 설치하되 접착력이 우수한 제품으   로 사용하여야 한다.

(3) 안테나 조립 시 강한 바람(60m/s 이상)으로 파손 및 훼손이 되지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

(4) 안테나 수신장치 설치 완료 후 정상작동확인을 위한 동작테스트를 실시하여야 한다.

다. 지구관측위성(Terra/Aqua) 수신 장치 및 자료처리 부

(1) 수신시스템과 수신서버 등은 신제품 서버 랙(rack)에 장착하여 운용자가 편리하게 운용할 수 있도록 설치하여야 한다.

(2) 장비의 배열(수신장비 및 자료처리부)은 기존구성과 동일하게 설      치하되 변동사항은 감독공무원과 협의하여 설치/시공하여야 한      다.

(3) 각 장치별 랙은 한 눈에 운용 상황을 파악할 수 있도록 설치하여야 한다.

(4) 본 공사 장비 및 타 장비 운용에 영향을 주지 않도록 설치하여야 하며, 운용자 요구에 맞도록 설치하여야 한다.

(5) 지구관측위성(Terra/Aqua) 수신자료 처리 업무 중단을 최소화       하기 위하여 이설공사 이전에 신제품 안테나케이블과 관련 장비      의 전원․통신․접지 케이블 공사를 설치장소인 국가기상위성센      터에서 먼저 실시하여야 한다.

(6) 자료처리부의 데이터 손실에 대비하여 전체 소프트웨어에 대한       (Terascan 포함) 관련 자료를 백업하여야 한다.

(7) 기타 필요한 사항은 감독자와 협의하여야 한다.

라. 정지궤도위성(Meteosat)장비 수신 장치 및 자료처리 부

(1) 이전작업 완료 후, 이설전의 동작상태와 동일해야하며 안테나 정상작동 유무를 확인해야 한다.

(2) 수신 시스템 및 서버 등을 분리 해체하여 국가기상위성센터(진천)에 이동한 후 지정한 장소에서 안테나시스템과 연결한 후 장비 가동상태가 정상인가를 확인하여야 한다.

마. 기타 장치부

(1) 각 랙 및 장치부, 커넥터 등의 입․출력 배선은 덕트(steel duct)      등 으로 마감 처리하여야 한다.

(2) 각 장치 고정부분에 사용되는 볼트/너트는 녹이 슬지 않는 제품      을 사용하여야 하며, 반드시 스프링와샤, 평와샤를 사용하여야       한다.

(3) 외부의 결선용 단자는 KS 규격품 또는 동등 이상 제품을 사용하      며, 배선 연결부분은 압착단자 및 커넥터로 마감 처리하여야한       다.

바. 지구관측위성(Terra/Aqua) 케이블 결선 및 기타

(1) 모든 케이블은 초단과 종단 부분에 용도 및 식별이 가능토록 라      벨을 반드시 부착하여야 한다.

(2) 각종 노후화된 통신케이블(커넥터 포함) 및 전원케이블(접지용 멀       티콘센트 등)은 신제품으로 교체하여야 한다.

(3) 케이블 포설 시 수직 내측 굴곡에 특별히 유의하여 트레이의 외       형에 따라 충분한 여유를 두고 트레이 내에 정리정돈 배열을 하       되 타 장비의 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

(4) 케이블 결선 시 종단은 향후 장비 이전에 대비하여 여유를 두되      나선 모양으로 한번 감은 후 처리하여 커넥터 부분에 필요 이상      의 장력이 가해지지 않도록 하여야 한다.

(5) 랙 내 결선 시 전용 덕트를 이용하여 처리하되 초, 중, 종단 부분      에 장력이 가해지지 않도록 하여야 한다.

(6) 외부에 설치 및 포설되는 케이블 보호관은 외부 방수용을 사용하      여 설치하여야 한다.

(7) 외부에 설치되는 함체들은 방수 및 녹이 슬지 않는 제질(스테인      레스)로 제작 설치되어야 한다.

(8) 낙뢰로부터 일정 공간을 보호하기 위한 낙뢰보호설비는 피뢰접       지 시스템과 장비접지시스템으로 구성하며, 피뢰접지시스템은 피      뢰침, 피뢰도선, 접지시스템으로, 장비접지시스템은 장비접지선과      접지시스템으로 구성하여야 한다.

(9) 낙뢰보호설비는 정보통신공사업법 규정에 따라 정보통신공사업       면허를 가진 사업자가 수행하여야 하며, 시공 전 계약자는 사업      자의 정보통신공사 면허증 사본을 제출하여야 한다.

(10) 낙뢰보호설비 설치 후 저항 값을 측정․기록하여 검사요청 시 증      빙서류로 제출하여야 한다.

사. 지구관측위성(Terra/Aqua) 각 장치별 성능시험 및 조립상태 검사

(1) 3.1m 안테나에 대한 시공 점검 및 성능시험을 실시하여 그 결과     를 감독자에게 증빙자료로 제출하여야 한다.

아. 하자보증 기간

계약상대자는 지구관측위성(Terra/Aqua) 이전․설치 공사 검사․ 검수 완료 후 아래의 제시된 하자보증 기간 동안 최적의 장비 성능을 보증하여야 한다.

(1) 안테나부 : 검사․검수 완료일로부터 1개월

(2) 수신장비 및 자료처리부 : 검사․검수 완료일로부터 1개월

5. 유지 관리성

가. 지구관측위성(Terra/Aqua) 장비 운영에 지장이 없도록 설치하여      야 하며, 유지보수의 용이성 및 향후 확장성을 고려하여 설치할      수 있도록 이전․설치 전 구체적인 설계도를 작성하여 감독관에     게 서면으로 제출 후 허락을 득하여야 한다.

나. 계약자는 장비 이전․설치 후 장비 장애에 따른 작동 불능 시 복     구 기간 동안의 운영에 대한 지침 또는 방안을 구체적으로 제시     하여야 한다.

6. 안정성

가. 안테나부 이전․설치에 따른 기초 및 풍압하중 등 설치에 따른      안정성을 제시하여야 한다.

나. 계약자는 장치별 절체 및 백업에 대한 방안을 작성하여 장비 이     전․설치 전 서면으로 제출하여 감독자의 허락을 득한 후 설치/     시공하여야 한다.

다. 시스템 이전․설치 후 장애에 대한 작동 복구 및 대처 방안을 제    시하여야 한다.

라. 전원 및 통신 계통에 적합한 낙뢰보호시설을 방안을 제시하여야     한다.