정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2015-09

담당부서

작성자

국가기상위성센터/위성운영과

신동기/070-7850-5754

정 책 명

정지궤도 기상위성 지상국 개발

사업개요

및

추진경과

○ 목적

- `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의 국가기상위성센터 지상국 시스템을 개발 및 구축

○ 추진기간 : 2014.7 ~ 2019.5

○ 총사업비 : 5년간 총 911억원

○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI, 주관), 항국항공우주연구원, 한국천문연구원

○ 주요내용

- 기상 및 우주기상 자료 수신처리 시스템 개발․구축

- 정지궤도 기상위성 (부)관제시스템 구축

- 기상위성 자료 관리 및 서비스 시스템 개발․구축

- 기상 및 우주기상 자료처리 알고리즘 개발

- 기상위성 자료 활용기술 개발

- 지상국 개발 사업관리 및 감리

○ 추진경과

- '07 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

- ‘09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

- ‘10. 11월 : 독자기상위성 자료처리 및 활용기술 개발 기획연구

- ‘11. 11월 : 정지궤도 기상위성 자료처리 기술개발 선행연구

- ‘11. 12월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기획연구

- ‘12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 착수

- ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

- ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

(AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

- ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

- ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

- ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

- ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

(국가기상위성센터 훈령 제22호)

- ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

- ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

- ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결 - ETRI

- '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

- ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

(한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

- ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

- ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR)

- '15. 3월 : 자료처리 알고리즘 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 활용기술 1차년도 선행연구 결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 우주기상 자료처리 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR) 및 평가

- '15. 4월 : 지상국 개발 1차년도 연차평가

- `15. 5월 : 지상국 개발 과제 2차년도 협약

(한국전자통신연구원/기간 `15.5.1~`16.2.29/145.5억원)

- `15. 6월 : 기상요소 알고리즘 개발 용역 착수보고회 개최

- `15. 6월 : 후속 지상국 시스템 설계방향 점검회의 개최

- `15. 8월 : 활용 및 분석기술 개발 용역 착수보고회 개최

- `15. 8월 : 공통테스트베드 web open

- `15.11월 : 제1차 기상청 국제 기상위성 컨퍼런스 개최

(더팔래스호텔 서울/11.16~11.18/국내외 기상위성 관련자)

- `15.12월 : 지상국 개발 예비설계 검토회의(PDR)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 위성운영과 기상사무관 신동기

- 최종 결재자 : 기상청 청장 고윤화

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	권태순	부이사관	`13.5.8～`14.7.20	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이재원	부이사관	`14.7.21～`15.1.21	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이미선	부이사관	`15.1.22～현재	국가기상위성센터 업무 총괄
과장	손승희	기술서기관	`09.10.26～`14.3.30	위성운영과 업무 총괄
과장	연혁진	기술서기관	`14.3.31～현재	위성운영과 업무 총괄
사무관	장재동	기상사무관	`10.1.27～`15.7.12	지상국 개발사업 실무 총괄
사무관	신동기	기상사무관	`15.7.13～현재	지상국 개발사업 실무 총괄
담당	오현종	기상연구사	`10.11.30～현재	기상국 개발사업 기술분야 총괄
담당	김미주	8급	`10.4.30～14.3.30	기상국 개발사업 사업관리 총괄
담당	박성희	7급	`14.3.31～현재	기상국 개발사업 사업관리 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 지상국 개발위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	이**	한국과학기술기획평가원	정책, 계획
위촉위원	박**	㈜에이알테크놀로지	위성시스템
위촉위원	박**	국방과학연구소	위성개발
위촉위원	지**	극지연구소	우주기상
위촉위원	김**	충북대학교	정보공학
위촉위원	김**	연세대학교	기상자료처리
위촉위원	조**	서울대학교	해양환경
위촉위원	이**	한국수치예보모델개발사업단	연구사업관리

○ 기상위성개발 추진위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	정**	조선대학교	기상관측
위촉위원	은**	남서울대학교	위성시스템
위촉위원	오**	부경대학교	기후
위촉위원	조**	과학기술정책연구원	위성정책
위촉위원	장**	한국항공대학교	위성시스템
위촉위원	김**	한국해양과학기술원	위성자료활용
위촉위원	원**	연세대학교	원격탐사
위촉위원	변**	KISTEP	기획평가

추진실적

<2014년도>

○ 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업 1차년도 협약 체결

- 주관연구기관: 한국전자통신연구원

- 연구기관/연구비: `14.7.1～`15.4.30 / 2,730백만원

○ 감리 용역사업 장기 계속 계약 체결

- 계약자: (주)한국정보기술단

- 계약기간/계약금액: `14.11.16～`19.6.30 / 1,240백만원

(1차년도: `14.11.6～`14.12.31 / 30백만원)

○ 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 구성도 >

- 분야별 시스템 요구사항 실무반 검토: ‘14.7.1～12.15

- 시스템 요구사항 검토회의(SRR): `14.12.16

- 지상국 시스템 요구사항 검토 기술단계 정기감리(5일간) 및 정기감리 종료회의(`14.12.12)

○ 감리 용역사업 2차년도 계약 체결

- 계약기간/계약금액: `15.1.1～12.31 / 287백만원

<2015년도>

○ 시스템 요구사항 검토 후속회의 (delta-SRR)

- 시스템 요구사항 검토 후속회의 개최: `15.1.27

< 사용자 요구사항 반영 현황 >

- 시스템 요구사항 검토 기술단계 2차 정기감리(10일간) 및 종료회의(`15.1.30)

○ 자료처리 알고리즘 및 활용기술 개발 분야 1차년도 추진

- 자료처리 및 활용기술 개발 중간보고(`15.1.29)

- 자료처리 알고리즘 1차년도 최종보고(`15.3.31)

- 활용기술 선행연구 최종보고(‘15.4.1)

- 우주기상 자료처리 기술 개발 1차년도 최종보고(‘15.4.10)

- 자료처리 알고리즘 23종 개발 및 활용기술 선행 연구(필요기술 선정 및 개발계획 등) 완료

○ 시스템 개념설계 검토회의(SDR) (`15.4.7)

- 지상국 및 6개 서브시스템 규격 작성

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 규격 현황 >

- 기상 요소 자료처리 알고리즘 개발 및 소통을 위한 공통테스트베드 시제품 개발

< 공통테스트베드 구성도 >

- 대형 송수신 안테나 2기 설치 후보지 조사(`15.3.10)

○ 시스템 설계방향 점검회의 (`15.6.30)

- 시스템 아키텍처, 서브시스템 상세설계 계획 및 연구수행 방향 논의

- 주요 논의 사항: 1) 시스템의 메시지는 관리망으로, 위성 및 보조자료는 데이터망 이용 원칙, 2) 시스템별 업무 위주로 기능을 분류 한 후, 기능별로 타 시스템과의 접속방안 도출 등)

○ 안테나 설치부지 확보 추진

- 국가기상위성센터 내 안테나 2기를 설치하기 위한 부지 추가 필요

- 진천군과 대체 군유지 선정 협의 완료(진천군의회 의결 승인 및 한국자산관리공사 사용승인 가능 확인)

- 향후 기재부 승인 후 소유권 이전 등기 예정(`16.4)