“기상위성센터 지상국시스템 설계 용역” 사업 설명회 개최 안내

o 일시 : 2006년 3월 9일(목) 16:00 ~ 17:00

o 장소 : 기상청 4층 소회의실

o 내용 : 별첨 참조

o 사업기간 : 계약 후 6개월(예정)

o 문의처 : 02) 2181-0567

o 담  당 : 심재면 사무관

<별첨>

기상위성센터 지상국시스템 설계 용역(안)

2006.  3.  .

예    보    국

기 상 위 성 과

기상위성센터 지상국시스템 설계 추진계획(안)

1. 추진배경 및 목적

○ 국가우주개발중장기계획에 따라 기상청은 과학기술부, 정보통신부, 해양수산부와 공동으로 2008년 말에 발사 예정인 통신해양기상위성을 개발하고 있으며, 위성자료의 활용시스템은 각 부처가 별도로 구축하기로 함.

○ 기상청은 안정적인 기상위성 운영기반을 마련하기 위하여 기상위성 발사 1년 전에 충북 진천군 광혜원면에 기상위성센터를 신축하고, 위성의 운영과 위성자료의 송수신, 처리, 분석 등을 위한 지상국 시스템을 구축하는 사업을 추진하고 있음.

○ 따라서, 통신해양기상위성의 운영과 활용을 위한 시스템과 외국위성 활용시스템 중 일부를 통합할 기상위성센터 지상국시스템을 효율적으로 구축하기 위한 설계 용역을 추진하고자 함.

2. 사업추진 방향

○ 위성자료 수신/처리/분배/활용시스템 소프트웨어 개발의 국산화를 통한 독자적 기술 확보

○ 통신해양기상위성 개발일정, 기상위성센터 신축 일정과 연계하여 지상국시스템을 구축할 수 있도록 설계와 시스템 개발 및 구축의 연속성을 확보하기 위해 설계직후부터 시스템 도입준비 추진

○ 통신해양기상위성 자료의 수신/처리/분배/활용 등의 기상 임무는 물론, 위성운용센터(한국항공우주연구원)와 상호보완적 역할을 수행하도록 시스템 구축

3. 주요 사업 내용

○ 기상청 내․외 기상위성 사용자 및 시스템 요구사항 분석

○ 기상위성센터 지상국시스템 설계

- 시스템 요구사항 만족여부, 이용환경, 비용 및 운영 효율성 등을 감안하여 최적의 물리적 구현방안 제시

- 현재 기상위성과에서 운영하고 있는 기존의 외국위성 수신․활용 시스템을 통합하여 운영할 수 있도록 확장성을 고려하여 설계

- 종합기상정보시스템(COMIS-3) 구축사업, DB 사업 등과 연계

○ 지상국시스템의 S/W 설계

- 새로운 S/W의 개발을 위한 요구기능 정의, S/W 구조설계, 기능내역 정의 등 기상위성센터의 효율적 운영을 위한 S/W 설계

- 위성영상처리, 분석 S/W는 자체개발 위한 설계

○ 기상위성센터 지상국시스템의 효율적 운영방안 제시

○ 기상위성센터 지상국시스템 구축의 단계별 추진방안 수립

4. 사업기간과 사업비

○ 사업기간 : 계약 후 6개월

○ 추진방안

- 입찰방법 : 공개경쟁입찰 후 협상에 의한 계약체결

- 평가방법 : 기술평가 : 80%, 가격평가 : 20%

5. 사업추진일정

추 진 내 용	2006년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
◦ 사업계획 수립 및 심의
◦ 제안요청서 작성 및 구매의뢰
◦ 입찰 및 계약
◦ 지상국시스템 설계 및 사업관리
◦ 검수 및 시스템 도입준비

6. 향후 계획

○ 2007년  : 기상위성센터 신축, 지상국 시스템 개발 및 구축

○ 2008년  : 통신해양기상위성 지상국 통합시험 및 위성 발사전 시험운영

○ 2009년  : 위성 발사후 시험운용 및 정상운영