울산기상대 청사 신축 공사

건축분야 설계용역 과업지시서

2012.  12.

부산지방기상청

목      차

제 1 절     설계 일반사항

제 2 절     설계 진행사항

제 3 절     설계 일반지침

제 4 절     세부 설계지침

제 5 절     설계도서 작성 요령

제 6 절     납품도서목록

제1절 설계일반사항

1. 설계개요

가. 용 역 명 : 울산기상대 청사 신축공사 건축분야 설계용역

나. 대지위치 : 울산광역시 중구 서동 산 8번지 일원

다. 설계기간 : 착수일로부터 90일 이내

라. 시설개요

1) 부지면적 : 10,644㎡

2) 건축연면적

가) 청 사(경비실 포함) : 연면적 800㎡±5 / 지하 1층 지상 1층

3) 구  조

가) 청 사 : 철근콘크리트 슬래브지붕

다) 경비실 : 철근콘크리트 슬래브지붕

4) 용  도 : 울산기상대 청사, 경비실

5) 시설부지 조성

노장조성 공사, 청사 정문설치, 부지경계 울타리 공사, 배수 및 포장공사 등

* 부지면적, 시설규모, 총공사비는 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있음.

마. 총 공사비 : 2,839백만원

공사비는 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 폐기물처리 등에 대한 총공사비이며 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.(전기,통신,소방 설계는 별도 계약체결 예정)

바. 용역조건

1) 설계용역기간은 계약일로부터 90일로 하며, 다음의 경우에 설계용역기간을 변경하거나 정지할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의2(계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

2) 단, 설계용역 완료 후 라도 설계용역과 관련한 각종 인․허가업무 자료의 제출 및 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때가지 계약상대자(이하 “설계자”라 한다)의 책임으로 별도 수행한다.

3) 용역기간 내에 수요기관의 사정으로 인한 과업내용 변경 시에는 그에 따른 부산지방기상청의 지시에 따른다.

사. 설계용역 범위

1) 설계범위 : 건축(토목, 조경, 기계 포함) 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 작성

2) 용역범위

가) 기본설계도서 작성(3개이상 기본계획안 제시 포함)

나) 실시설계도서 작성

다) 측량 성과도 및 보고서(경계측량, 현황측량 등)

라) 지질조사보고서 작성(지질조사 공수 : 2공)

마) 공정표 작성

바) 관계법령에 의한 건축 심의, 건축 협의(인․허가) 행정수속 대행 일체

사) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

아) 조감도, 사진영상물

자) 기존건물의 철거(청사)

2. 설계용역 일반사항

가. 설계의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의계획및이용에관한법률, 지적법 등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없는 것이어야 한다.

나. 납품 : 납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야한다.

4) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

라. 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 설계용역 기간

1) 본 과업은 과업지시서와 관계법령 및 규정 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

2) 본 과업은 착수일로부터 90일 이내에 납품하여야 하며 기본설계는 발주처의 서면 승인을 얻은 후 실시설계를 진행하여야 한다.

가) 기본설계 : 착수일로부터 30일 이내에 완료 후 중간보고

나) 실시설계 : 착수일로부터 90일 이내에 완료 후 최종보고

3) 착수

도급자는 계약 후 7일내 과업에 착수하여야 하며, 착수시에는 착수계를 제출하여 승인을 받아야 한며, 사업수행계획서(용역추진 예정 공정표 포함)을 동시에 제출한다.

4) 진행보고

설계진행 중 부산지방기상청장이 지정한 감독관(이하 감독관이라 칭한다)의 요청시 도급자는 각 단계에서 보고내용 승인을 얻은 후 다음 단계 업무에 착수하여야 하며, 설계용역 납품예정일 10일전에 납품목록 및 성과품에 대한 예비검사를 받도록 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 반드시 수정하여 납품하여야 한다.

3. 설계의 기본방향 및 개요

가. 시설규모의 적정화

기상관측 및 예보업무, 고층기상관측, 지진해일 조기경보센타 등 기상업무(이하 "기상업무"라 한다)를 효율적으로 수행할 수 있는 규모

나. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변 환경과 조화롭게 설계

2) 대지가 안정성 있도록 하여야 하며 구내도로, 부대 시설물 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

다. 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

3) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

라. 저탄소․에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용(LED전등) 및 고효율 시스템 설계

3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도에 따른 적정 조도의 반영

4) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

5) 태양열에너지 사용을 위한 온수․난방 및 발전시스템 20%이상 반영은 제시된 예산의 범위내에서 설계

가) 태양열 온수․난방 및 태양광 발전시스템 설계시 시설의 관리 및 유지의 적정성을 고려하여 설계에 반영

나) 태양열 집열공간 확보시 관측환경 저해요인 배제

마. 환경친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

4) 청사의 외형은 울산지역의 정서와 자연환경에 부합하도록 설계

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

4. 관급 및 주요자재 등

가. 직접구매 대상품목으로 지정된 품목은 조달청 및 수요기관과 협의하여 반드시 설계에 반영하여야 한다.

나. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 부합되지 않는 한 성능인증제품, 조달청 우수제품 등  사용을 검토하여야 한다.

공사용자재 직접구매(관급) 대상 품목은 중소기업청 공고 제2007-49호(2007.02.22)에 의하며, 품목당 추정가격이 3천만원 이상(단, 에너지이용합리화, 기술개발촉진 및 환경보전제품 1천만원 이상)으로 하며, 인증제품이 중복 될 경우는

① 수요기관에서 지정하는 제품

② 조달청 선정 우수제품 또는 중소기업청 성능인증제품

③ 친환경상품 또는 신기술인증제품

④ 특허, 실용신안제품 등

다. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적인 자재 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설의 방염시설기준을 적용한 자재사용.

제2절 설계 진행 사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행 시 제출서류

설계자는 설계진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 설계착수 시

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류를 2부 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 계약자(건축, 전기 등)의 분야별 예정 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

5) 설계용역 예정공정표(계획, 중간, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

6) 계약금액에 대한 산출내역서 1부

7) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)현황 1부

8) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 기본설계 제출 시

1) 기본설계도서 3개안(대안제시포함)

2) 관련법규 검토서

3) 현장조사 결과보고서

4) 현황측량 성과도

4) 태양열에너지를 사용한 온수․난방 및 발전시스템은 1개이상 작성하여 제출한다.

5) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 실시설계 제출 시

1) 실시설계도서 일체

2) 공사예정공정표(공사기간 산출근거 포함)

3) 건축협의서

4) 설계검사원

5) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

3. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 1회 작성(일요일 기준으로 월요일에 제출)하여 제출한다.

2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 제출한다.

3) 수시보고

부산지방기상청 및 울산기상대의 요청 및 설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련돤 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 10일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

4. 인․허가를 위한 자료 제공

설계자는 울산기상대 청사 신축공사를 위하여 추진하는 도시계획시설결정 용역에 필요한 배치계획, 건축설계 등에 대한 자료를 설계자의 부담으로 제공하여야 한다.

5. 보안성 검토

가. 설계 용역자는 본 과업지침서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

제3절 설계 일반 지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 저탄소․에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결, 지반상황, 우․오수관 위치, 전기인입점 등 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

바. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

사. 기타 발주자의 요구사항 반영 등

2. 분야별 설계일반지침

가. 건 축

1) 건축설계 일반사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형의 설계

마) 창호는 환기 및 채광이 최적화 되도록 설계반영

바) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

사) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되도록 경량칸막이 설계

아) PD(배관), AD(공기덕트), EPS(전력관로), TPS(통신관로) 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다

자) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 공공청사 건물로서 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 설계반영

2) 건축설계 특기사항

가) 미래지향적인 첨단기능과 고효율성 위주로 설계

나) 기상관서의 특성과 상징성을 유지하며, 주변 환경과 미관 등 조화유지

다) 현대적인 시설과 공법으로, 건축물의 안전성, 경제적인 최신 건물설계

라) 쾌적한 사무환경 조성

마) 청사는 진입로에서 건물의 정면성이 강조될 수 있도록 배치하고 조망을 고려 난방비가 절약되도록 배치

바) 건축면적은 산출된 면적표에 의하되 연면적 변경이 가능하고 증․감이 있을 경우 발주처와 사전 협의를 거쳐야 한다.

3) 구조계획

가) 기능이 적절하고 안전하며 경제적인 구조가 되어야 한다

나) 대지의 지질조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

다) 증축을 감안하여 안전한 구조가 되어야 한다

4) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

나. 토 목

1) 일반사항

가) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

나) 설계에 임하기 전에 수급인은 현장답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 등 제반사항을 조사하고 울산기상대의 요구사항을 기본 설계에 반영하여야 한다.

다) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 대지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 기본설계에 사용한다.

라) 대지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

마) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도 등은 세분하여 작성한다.

2)특별사항

가) 부지조성과 관련하여 인접대지에 피해를 주지 않은 방법을 강구해야 한다.

나) 주변 배수현황을 정확히 파악하여 우수, 오수처리가 되도록 설계한다.

다) 하수도 기초공사는 지반 종류에 따라 관의 침하 대비책을 반영한다.

3) 현황측량

가) 현황측량의 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주자의 확인을 받는다.

나) 현황측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위도로망 및 도시계획 선까지 기재하고 대지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

다) 측량 시 기존 건물, 전주, 분묘 등을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화 하여야 한다.

라) 가 수준점(T.B.M.)은 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

4) 토공사 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 지질조사 결과 연약지반일 경우 건물의 부동침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

마) 현 청사부지 평탄면을 절토 및 성토하여 관측장소 및 부지 확장공사를 하여야 한다.

바) 성토부분에는 토사가 무너지지 않도록 옹벽을 설치 하여야 한다.

5) 구내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 오수처리는 오수처리시설을 설계에 반영한다.

6) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

다) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 포장 면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장 면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

마) 화재발생시 소방차의 진입이 가능하도록 설계에 반영한다.

7) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

라) 대지 경계(메쉬 휀스 등)를 기준으로 울타리 기초를 견고하게 시설하고 청사 출입이 편리하게 정문이 설치될 수 있도록 설계한다.

마) 부지내의 수목은 청사 신축에 지장이 없는 한 유지하고 수목의 절단은 최소화 한다.

다. 조 경

1) 일반사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장, 화단 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용 공간 등을 고려하여 적절하게 계획하여야 한다.

라) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

마) 조경은 해당지역의 조례 등을 고려하여야 하며 지역주민 및 민원인에게 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

바) 조경수종 선정은 기상관측에 영향이 없도록 울산기상대와 협의하여 결정한다.

사) 기상관측 노장 이전확장에 따른 노장조성계획을 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하되 기상청의 계절관측목(단풍나무, 배나무, 매화, 복숭아, 벚나무, 진달래, 개나리, 은행나무)을 포함한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

라) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

마) 기존청사의 조경수의 사용을 설계에 반영하여야 한다.

라. 기계설비

1) 기계설비 일반사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 기본조사를 하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 냉난방설비, 위생설비, 소화설비 등은 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 한다.

2) 기계설비 일반지침

가) 냉난방설비

o 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 적극검토 반영 하여야 한다.

o 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

o 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하게 설계함을 원칙으로 한다.

o 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나) 위생설비

o 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

o 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

o 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실(비데포함), 사워실 등으로 공급한다.

o 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

o 위생기구는 KS제품 또는 동등 이상품을 사용한다.

다) 소화설비

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

라) 기타설비

1) 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

2) 기상관측용 장비 기능유지에 합리적이어야 하며 설비상호간의 기능적 마찰

이나 역기능이 없어야 한다.

사. 임시가설사무소

o 청사신축 공사중 사용할 임시가설사무소 설치에 관해 울산기상대와 위치, 설치방안 등을 협의하여 설계하되 전기 및 냉난방 설비의 설계를 포함한다.

자. 경비실 설계

o 정문 출입구에 위치하고 주변의 경관과 친화적으로 설계하고 주위 감시에 최적의 상태로 설계한다.

3. 설계도서의 분리작성

건축(토목, 기계설비, 조경 포함)을 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계도면 : M

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

5. 도면작성

가. 제도용지원도(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1(국제엠네스티) 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

라. 토목, 건축, 기계설비 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 한다.

제 4 장  세부 설계지침

1. 건축설계 세부사항

가. 청사

1) 지하층 : 발전기실, 체력단련실, 자재창고, 물탱크실 등

가) 하층 동쪽은 바닦면까지 흙을 제거하고 외부에서 대형장비 등의 운반이 가능하도록 출입문은 양여닫이문(폭 2m × 높이 2.5m 이상)으로 설치한다.

나) 체력단련실은 향후 고층, 지진 등 업무증가에 대비하여 장비보관 장소로 활용할 수 있도록 설계한다.

다) 물탱크는 산불 발생시 진화에 활용할 수 있도록 충분한 용량과 가압펌프를 갖추어야 한다.

라) 발전기실

- 발전기실은 50kW급 발전기 1대, UPS 1대, ATS 1대 및 유류탱크를 설치할 수 있는 면적으로 설계한다.

- 발전기 운행시 진동 및 소음을 줄일 수 있도록 설계한다.

- 발전기실의 출입문은 충분한 크기의 양 여닫이문으로 설계한다.

- 발전기 설치에 따른 배기구 및 환기구를 설계에 반영한다.

- 발전기에 사용되는 유류를 보관할 수 있는 유류보관탱크(400리터 이상) 공간을 설계에 반영한다.

2) 지상 1층 : 현업실(예보, 관측), 민원실, 행정실, 전산/통신실, 화장실(남,여) 등

가) 현업실과 전산/통신실 바닥은 이중마루(Access Floor)를 설계한다.

나) 전산실 설치장비 : 광단국장비, ATM장비, 라우터, , 허브, 지진장비 등

다) 청사의 현업실, UPS실 등은 비트로 연결되도록 설계하고, 전기․통신 선로가 추가 설치될 수 있도록 충분한 tray 설치한다.

라) 현업실 Access Floor 바닥에는 시스템박스를 설치하고 UPS 출력(단상 220V,

3wire)이 system box에 수용되도록 설계한다.

마) 화장실은 남녀화장실로 구분하여 설계한다.

3) 지상 2층 : 회의실/홍보실, 휴게실/숙직실, 장비보관실, 기상자료 보관실, 기관장실, 탕비실, 화장실(남/여) 등

가) 회의실/홍보실은 기상업무홍보 등의 용도 사용이 가능하도록 설계한다.

나) 자료보관실, 장비보관실은 습기에 노출되지 않토록 설계한다.

다) 식당에는 조리시 발생하는 냄새를 외부로 배출하는 설비를 갖추어야 한다.

4) 기타사항

가) 고층 및 지진관측망 확층에 따른 증축 시 건물하중을 대비하여 설계한다.

나) 화장실, 청소 등에 사용하도록 친환경적인 중수도시설과 빗물활용시설을 설계한다

나. 경비실

가) 사무실 : 차량 및 출입자 통제가 가능하도록 시야 확보된 구조

나) 방 : 천정 및 외벽에 단열재 시공 설계

다) 화장실 : 타일, 세면대, 변기, 냉․온수 파이프 설계

라) 옥상 : 방수콘크리트 시공

다. 기타

1) 청사배치(안) : 기상청 제안을 충분히 고려하되 건물의 안전성과 효율적인 이용이 될 수 있도록 설계한다.

2) 청사 통신선로 사항

가) IP폰 설치 : 13대(현업 3, 전산실 1, 행정실 3, 민원실 2, 기관장실 1, 식당 1, 기타 2대)

나) 통신회선은 전용회선 E1급(광단국 등 필요장비 포함)으로 설계

3) 접지사항

가) 건물, 전기, 통신 등 공통 접지는 규정 및 기준에 맞게 접지공사를 반영한다.

나) 접지단자함을 전산실 및 각 사무실에 각각 설치한다.

다) KS C IEC 61024(건축물 등의 낙뢰보호 시스템) 적용

라) 피뢰침용 접지를 시설하고 옥상 단자함을 설치하여 연결 시공될 수 있도록 설계한다.

마) 전기접지, 통신접지 등은 5Ω이하로 분리 설계한다.

4) 전원사항

가) 일반전원

o 한전의 메인 분전함은 발전기실에 설치한다.

o 전원케이블은 지중으로 설치함을 원칙으로 하며, 예비용 관로를 포설한다.

o 써지로부터 장비를 보호하기 위하여 각 분전반에 써지 보호기를 설치한다.

o 분전반 및 각 전원콘센트는 반드시 접지를 한다.

o 각 분전반에 시건장치를 설치하고 누전차단기를 설치한다.

o 전등은 에너지 절약을 고려하여 3파장을 사용한다.

나) UPS 전원

o UPS 전원은 현업실과 전산실에 설치되어야 하며, UPS 메인 분전반에는 현업실과 전산실로 구분하여 브레이커를 설치한다.

o 현업실 천장에 비상용으로 사용하기 위한 UPS전원 전등 설치

o UPS 전원에는 각각 표시라벨을 부착(UPS전원용)

다) 청사 통신선로 사항

o 청사로 인입되는 통신케이블은 지중으로 설치하며, 예비관로를 포설

o 각 사무실에 보조단자함(IDF)를 설치

o 각종 케이블을 트레이에 설치

o 각 사무실 및 지하층에 네트워크 연결을 위한 LAN케이블을 설치

o 각 단자함마다 시건장치를 설치

5) 냉․난방설비

가) 냉․난방기를 설치(현업실, 행정실, 민원실, 전산/통신실, 기관장실, 회의실)한다.

나) 현업실 및 전산/통신실 냉․난방 설비는 다른 사무실과 별도로 구성하여 야간이나 휴일에 별도로 가동함으로서 전기를 절약할 수 있도록 하여야 한다.

다) 실외기 설치 공간을 확보한다.

6) 태양열 에너지 설비

가) 태양열을 이용한 온수․난방 및 발전시설을 설치한다.

7) 창문

가) 건물의 창문은 이중창으로 설치하되 빗물이 침투되지 않게 해안 바를 설치한다.

나) 햇빛을 충분히 이용할 수 있도록 설계한다.

다) 사무실용은 차광용 롤스크린 및 방충망 설치

라) 창틀은 단열이 잘되는 재질을 사용한다.

마) 현관문에 에어커튼을 설치(벌레, 곤충 차단 및 내부공기 차단)한다.

바) 현관문을 이중으로 설계(단열 및 풍압 고려)한다.

8) 야외공간 활용

가) 견학 및 관람객을 위한 야외 휴식 공간 및 조경시설을 반영한다.

나) 주차공간은 부지 내에서 최대한 활용할 수 있도록 반영한다.

9) 기타사항

가) 정문에 비디오폰을 설치한다.

나) 청사 울타리는 주변 환경을 고려하여 휀스(메쉬휀스)를 설치한다.

다) 장애인 편의시설(화장실, 출입문, 계단 등)을 설치한다.

라) 옥외에 설치되는 시설 및 구조물의 재질은 가능한 부식을 고려하여 스테인리스 이상의 것을 사용한다.

마) 사무실과 사무실 사이의 벽은 상부에 차후 추가 시설을 감안한 충분한 배선용 통로를 설계한다.

<참고자료>

설치 예상 장비 현황(청사)

장소	품 명	모 델	수량	크 기 (W*D*H ㎜)	무게 (㎏)	소비전력 (kw)	비고
지하	물탱크	-	1	직경 1.5m	-	-
	모터펌프	-	1	직경 0.5m	-	-
전산실	통신장비	ATM WAN	1	-	-	2.0	220V
	통신장비	LAU	3	-	-	0.9	220V
	업무용PC	-	2	-	-	1.0
	냉/난방기	-	2	590*1,810*440	-	3	실외기 설치
현업실	안개관측감시 시스템	-	1	-	-	1.0	안개관측
	영상회의시스템	-	1	-	-	0.5	220V
	업무용PC	-	5	-	-	2.5	관측,예보
	무인자동관측소보안시스템	-	1	-	-	0.5	-
	Printer	-	2	-	-	0.5	220V
	복사기	-	1	-	-	0.5	220V
	FAX	-	1	-	-	0.2	220V
	스케너	-	1	-	-	0.5	220V
	냉/난방기	-	2	1,000*1,000*500	-	3.0	실외기 설치
행정실	업무용PC	-	4	-	-	2.0	220V
	Printer, 스케너	-	1	-	-	0.5	220V
	복사기		1	-	-	1.5	220V
	FAX	-	1	-	-	0.5	220V
	냉/난방기	-	1	1,000*1,000*500	-	2.0	실외기 설치
발전실	발전기	-	1	50KW	-	-	220V
	UPS(20㎸A)	MPS2005		590*1000*1200	-	-	-
	UPS(배터리)	250Ah*16개		UPS*1.2	-	-	-
민원실	업무용PC	-	2	-	-	1.0	220V
	민원용PC		1	-	-	0.5	220V
	Printer	-	1	-	-	0.3	220V
	냉/난방기	-	1	1,000*1,000*500	-	2.0	실외기 설치
기관장실	업무용PC	-	1	-	-	0.5	220V
	Printer	-	1	-	-	0.3	220V
	냉/난방기	-	1	1,000*1,000*500	-	2	실외기 설치
기타	비디오프로젝터	-	1	-	-	0.5	회의실
	냉/난방기	-	2	1,000*1,000*500	-	2	실외기 설치
계					-	22.6

제5절 설계도서 작성요령

1. 기본설계

가. 정의

“기본설계”라 함은 발주자로부터 제공된 자료와 현장조사 및 자료수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다.)의 기본시스템을 검토하여 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 3개 이상 발주자에게 제안하고 승인을 받는 설계단계이다.

나. 일반사항

1) 설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업진행시에는 2개 이상의 대안을 제시하여 발주자의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

2) 설계자가 제출한 3개 이상의 대안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다. 단, 그로 인한 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 실시설계를 진행한다.

4) 계획 설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

다. 계획(안) 작성 시 포함사항

1) 현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등

2) 종합배치계획(Master plan), 대지 내 동선계획, 주차계획

3) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

4) 개략공사비 산정내역

5) 기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

o 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

o 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

나) 현장조사

o 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․ 진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․ 보관하여야 한다.

o 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

o 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

o 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

o 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

o 대지 내 문화재 출토가능성은 없는지 조사를 실시하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 기본설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 기본설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

다) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

라) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

마) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

바) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

사) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

2) 조사측량

가) 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

나) 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

다) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 감독자와 협의 후 결정한다.

라) 가 수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

마) 조표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로 사용하며, 위치는 기계설치에 지장이 없는 양호한 지반에 설치한다.

3) 표시항목

측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장 물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

2. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다. (검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

o 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

o 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

o 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 설계내용에 반영

o 세부시공방법

o 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

o 건물의 색채사용계획

o 공정계획(공정표 포함)

o 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

o 설계근거기준

o 구조재료의 성질 및 특성

o 제반 하중조건에 대한 분석

o 각부 구조계획

o 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

o 지진에 대한 고려사항 등

o 구조계산서

다) 시방서

o 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

o 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

o 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

o 조감도(투시도) : 천연색채 사용

o 도면 목록표

o 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

o 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

o 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

o 구적도, 건축면적 산출표

o 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

o 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

o 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

o 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

o 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

o 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

o 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

o 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

o 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

o 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

o 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

o 기타 시공에 필요한 사항 일체

※입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계 설명서

o 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

o 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

o 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

o 세부시공계획

o 자재사용계획

o 세부공정계획

o 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

o 위치도

o 종단면도 및 횡단면도

o 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

o 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계 설명서

o 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

o 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

o 세부시공계획

o 자재사용계획

o 세부공정계획

o 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

o 배치도

o 종단면도 및 횡단면도

o 평면도

o 조경시설물 배치도

o 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

o 건축 주요부분 평면도, 단면도

o 범례

o 도면 목록표, 계통도

o 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

o 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

o 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

o 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

o 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

o 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

o 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료, 견적서 등

o 내역서작성은 “시설공사내역서 표준화 및 간소화”에 따라 작성하여야 한다.

5) 실시설계 최종납품은 계약일로 부터 90일이내 제출하여야 하며, 최종납품일 10일 전까지 분야별 완성 도서를 각 1부씩 제출하여 기상청의 검토, 보완 후 최종 납품하여야 한다.

제6절 납품도서목록

구분	종 류	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건축	토목	기계	전기	통신
1	설계 설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
2	원 도	A1	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	CD-ROM
		A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	CD-ROM
3	청사진 도면(A1 반접)	A2	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
	청사진 도면(A3 반접)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
4	공사시방서 (자재내역 및 시방서)	A4	6	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	내 역 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
6	일위대가표 (단가산출서)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
8	각종 설계계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
9	각종 설계기준 및 자료	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
10	조감도(투시도)	A2	1	부	◯					액자 표구
	조감도 칼라사진(4‘×6’)		10	매	◯
11	인․허가 및 관계부서 협의용 도면				◯	◯	◯	◯	◯	협의시
12	CD-ROM(조달청 발주용)		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯
13	PERT/CPM에 의한 Network 공정표	A3	3	매
14	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯

붙임 1〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 울산기상대 청사 신축 건축 설계

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2012.   .   .

4. 착수  일자 : 2012.   .   .

5. 완수예정일 : 2012.   .   .

-  아    래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2012.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

부산지방기상청장 귀하

〔붙임 2〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용 역 명 : 울산기상대 청사 건축 설계 용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2012.   .   .

4. 착수일자 : 2012.   .   .

5. 완료예정일 : 2012.   .   .

-  아   래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2012.     .     .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

부산지방기상청장 귀하

〔붙임 3〕 주간공정보고

주 간 공 정 보 고

� 용 역 명 : 울산기상대 청사 신축 건축 설계

� 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2012년   월   일 ～ 2012년   월   일

◦계약금액 :

� 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2012. . .)	금주예정사항(2012. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

부산지방기상청장 귀하

〔붙임 4〕 월간공정보고

월 간 공 정 보 고

� 용 역 명 : 울산기상대 청사 신축 건축 설계

� 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2012년   월   일 ～ 2012년   월   일

◦계약금액 :

� 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2012. . . ～ 2012. . .)	비고
첫째 주		(실시/예정공정)
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주
다음달	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

부산지방기상청장 귀하