	보 도 자 료
	기 상 청 기상홍보과 2001. 7. 9(월) 10:30

고층기상관측 종합 시스템 구축 계획 확정

기상청(청장 安明煥)은 기상예보 정확도 향상과 악기상 조기 포착 및 감시를 위한 고층기상관측자료의 안정적 확보를 위하여 라디오존데 관측망 확충, 윈드 프로파일러 등 첨단 원격탐측 방법에 의한 고층기상 관측시스템 구축 등이 포함된 고층기상관측망 확충을 위한 중·장기 계획을 수립하였다.

◑ 계획수립 배경

기상현상은 3차원적 현상으로서 정확한 기상예보를 위해서는 상층대기의 상태 파악을 위한 고층기상관측자료가 필요하다. 특히 최근 수치예보 모델과 컴퓨터의 발전으로 더욱 조밀한 간격의 지상 및 상층 대기에 대한 입력자료가 요구되고 있다.

현재 우리나라는 지상 관측망은 상당 수준 확보되어 있으나 고층기상망은 미흡한 실정이다. 이에 따라 고층기상관측망의 확충을 위한 중·장기계획을 수립하고 체계적으로 관측망을 확충해 나가고자 한다.

특히 일반적인 방식인 라디오존데 외에 윈드프로파일러 등 최첨단 원격탐측 방식의 자동관측 시스템을 함께 구축하여 고밀도의 고층기상관측자료를 안정적으로 확보할 수 있는 체제를 갖춤으로써 선진 고층기상관측시스템을 구현하고자한다.

이 계획은 2002년부터 2010년까지 연차적으로 수행되며 총 220억 원이 소요될 것으로 예상된다.

◑ 세부추진계획

□ 라디오존데에 의한 관측망 확충

□ 우리나라는 현재 기상청에서 4소(포항,제주,백령도,속초)와 공군에서 2소(오산,광주)를 운영 중에 있다. 향후 서해 남부에 위치한 흑산도(2003년)와 동해 중부에 위치한 울릉도(2005년)에 고층기상 관측소를 신설하고자 한다. 따라서 앞으로 기상청에서는 6개소의 관측소를 운영하게 되며, 공군의 2소를 포함해 우리나라는 모두 8개소의 라디오존데 관측소를 갖게될 것이다.

□ 윈드프로파일러 관측망 구축

□ 고층기상을 연속적으로 자동관측할 수 있는 윈드 프로파일러 관측시스템을 도입하여 라디오존데 관측소가 커버할 수 없는 지역에 대한 고층기상관측자료를 생산한다. 2003년 문산에 설치를 시작하여 2007년까지 진주, 추풍령, 원주, 군산 등 4개소에 설치하여 총 5개소의 윈드 프로파일러 관측망을 구축하게 될 것이다. 이렇게 될 경우 보다 안정적으로 연속적인 고층기상관측자료를 확보할 수 있게 되며, 또한 라디오존데 관측소와 함께 모두 13개소의 고층기상관측소를 운영하게 되어 고층기상관측소 밀도는 약 120km 정도로 선진국 수준에 이르게 될 것이다.

□ 라이더 관측망 구축

□ 최근 전지구적으로 중요한 과제가 되고 있는 대기환경 감시를 위해 오존과 에어러솔을 관측할 수 있는 라이더 관측 시스템을 도입한다. 기존의 안면도 관측소 외에 포항, 제주, 백령도 등 3지점에 설치하여 모두 4개소의 라이더 관측망을 운영하게 될 것이다.

◑ 기대효과

향후 고층기상종합관측시스템이 구축되면 고층기상관측 자료 연속적 수집이 가능해짐으로써 우리나라 부근의 악기상 조기 탐지와 기상예보정확도 향상 및 기상재해 최소화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

문의 : 기후국 관측관리관실 관측담당관 조하만	전화 : (02)831-0495

<보도 참고자료>

고층기상관측망 확충 중·장기 계획

1. 라디오존데 관측망 확충

가. 개요 : 현재 기상청에서 2001년 6월에 시작한 속초고층기상대를 포함하여 4개소의 라디오존데 관측소를 운영하고 있음. 앞으로 2개소의 관측소를 추가 신설하여 모두 6개소의 고층기상관측소를 운영하고자 함.

나. 설치 장비 및 장소

□ 앞으로 신설 고층기상대와 기존의 장비 교체 시에는 수소가스의 주입에서 부터 기구의 비양까지 자동으로 관측이 이루어지는 오토존데의 도입을 적극 검토함

□ 기존의 수동관측장비는 정규관측장비로 계속 이용될 것이며, 오토존데는 백업장비로 활용됨으로써 업무의 효율화를 기할 것임

□ 2007년 이후 현재 사용 중인 LORAN-C 방법이 중단되고 인공위성을 이용한 위치항법장치(GPS)가 실용화되면 장비 보완

□ 향후 신설 예정지 : 흑산도, 울릉도

다. 추진 일정

□ 흑산도 고층기상대 신설

- 예산 확보 : 2001년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2002년 하반기

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2002년 하반기

- 정규관측 실시 : 2003년 1월

□ 울릉도 고층기상대 신설

- 예산 확보 : 2003년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2004년 하반기

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2004년 하반기

- 정규관측 실시 : 2005년 1월

□ 기존 4개 고층기상대 장비 교체 (수동관측장비, 오토존데)

- 예산 확보 :  2006년 ∼ 2010년

- 포항, 제주, 백령도, 속초

〈 라디오존데 〉                          〈 라디오존데 관측망 〉

2. 원격탐측 방법에 의한 고층기상관측망 구축

최근 윈드 프로파일러, 라이더, 성층권 플랫폼 등 상층 대기의 관측을 위한 최첨단 원격탐측 기술이 등장하고 있음. 이에 따라 앞으로 상당 부분의 고층기상관측 자료의 생산을 이러한 최첨단 장비의 설치를 통해 이루고자 함.

가. 윈드프로파일러 관측망 구축

1) 개요 : 고층기상관측망의 밀도를 높이기 위한 방안으로 라디오존데 관측소의 사이에 윈드프로파일러를 배치함. 윈드프로파일러는 14km 정도 고도까지의 바람 관측을 저렴한 운영비로 연속 수행할 수 있는 이점이 있으며, 향후 고층기상 보조관측 장비로서 수치예보에 필요한 연직자료를 안정적으로 확보할 수 있게 할 것임

2) 설치 장비 및 장소

□ 장비 : 대류권용(탐지고도 : 14km)

□ 설치 예정 장소 : 문산, 진주, 추풍령, 원주, 군산

3) 추진 계획

□ 경기지방청에 설치 및 시험 운영

- 예산 확보 : 2002년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2003년 하반기

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2003년 하반기

- 정규관측 실시 : 2004년 1월

□ 윈드프로파일러 관측망 구축 (총 5개 지점)

- 기본계획 확정 및 예산 확보 : 2003년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2004년 ∼ 2007년

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2004년 ∼2007년

- 정규관측실시 : 진주(2005년), 추풍령(2006년), 원주(2007년),군산(2008년)

< 윈드프로파일러 >              < 윈드프로파일러 관측망 >

나. 라이더 관측망 구축

1) 개요 : 라이더는 레이저의 강력한 펄스 에너지와 지향성을 이용해 대기층에 부유하는 분자 및 입자를 원격 계측하여 대기계층의 구조, 상층운의 이동과 상층 대기의 에어러솔 분포 등을 측정하는 장비임.  현재는 안면도 지구대기감시소에 에어러솔 라이더 1대가 설치되어 있으며, 향후 에어러솔 및 오존 라이더를 추가 설치하여 정규 라이더관측망을 구축함.

2) 설치 장비 및 장소

□ 장비 : 에어러솔 라이더, 오존 라이더

□ 설치 예정 장소 : 포항(오존), 제주(에어러솔, 오존), 백령도(에어러솔, 오존)

3) 추진계획

□ 포항기상대 오존라이더 설치 및 시험 운영

- 예산 확보 : 2002년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2003년 하반기

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2003년 하반기

- 정규관측 실시 : 2004년 1월

□ 라이더 관측망 구축 (총 4개 지점: 안면도, 포항, 제주, 백령도)

- 기본계획 확정 및 예산 확보 : 2003∼2004년

- 관측시설 설계 및 공사 완료 : 2004∼2005년

- 장비 도입·설치 및 시험운영 : 2004∼2005년

- 정규관측 실시 : 제주(2005년),백령도(2006년)

< 라이더 >                                 < 라이더 관측망 >

다. 성층권 플랫폼 운영

1) 개요 : 고도 약 20∼23km 범위의 성층권에 통신 무선 응용 탑재체를 싣고 있는 비행선을 체공시켜 통신, 방송, 원격탐사, 전파감시, 측위 등을 행하는 시스템. 기상청이 독자적으로 자체에서 구입 운영하는 것은 어려우나 관련기관과 공동 운영은 충분히 가능한 것으로 생각됨. 현재 우리 나라에서는 2005년 이후 서비스를 목적으로 무선방송기술연구소에서 개발 중에 있으며 향후 기상 부문 수감부 개발과 함께 기상관측의 목적으로 활용될 수 있을 것으로 생각됨.

2) 설치장비 및 장소

□ 장비 : 비행선

□ 설치 예정 장소 : 추후 결정

3) 추진계획

□ 성층권 플랫폼 설치 및 시험 운영

- 예산 확보 : 2005년

- 설계 및 제작 : 2007년

- 시험운영 : 2008년

3. 고층기상관측업무 개선

가. 고층기상관측 운영 프로그램 개선

□ 고층기상관측자료 현장 AQC 프로그램 개선 및 운영(2002년)

- 모든 고층기상 수신장비의 수신자료 현장 자동검색(AQC) 가능 (포항, 제주, 백령도, 속초기상대)

- 공군고층기상 관측소(오산, 광주)에 AQC 프로그램 지원

□ 고층기상관측 수신 프로그램 개선(2002년)

- 모든 고층기상 관측장비에서 요구하는 연직 분해능을 얻기 위한 프로그램

- 수신 전에 이루어지는 수작업을 자동으로 할 수 있는 프로그램

나. 고층기상관측자료 데이터베이스 구축(2001년 ∼ 2005년)

□ AQC가 안된 1993년 이전 자료의 신뢰도 제고 작업 수행

□ 관측 개시 일부터 누락된 자료의 수집 및 입력

□ DB자료를 사용자 입장에서 자료 활용이 가능하도록 개선

□ 연직 분해능 50m 이하의 고층기상관측자료 데이터베이스 구축

다. 고층기상 수신장비 운영 방안 개선(2001년 ∼ 2005년)

□ 장비의 안정적인 운영을 위해 아웃소싱

□ 고층기상 담당직원 기술수준 향상을 위해 교육

□ 고층기상 수신자료 정확도 향상을 위해 지속적인 Upgrade

< 종합 고층기상관측망 >