정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

국가기상위성센터/위성기획과

②담당자

(전화번호)

위성기획과장 원재광

(070-7850-5701)

기상연구관 김도형

(070-7850-5705)

③정책사업명

정지궤도복합위성개발사업(기상청)

※ 2016년 과목구조 개편으로 사업명 변경: (기존)정지궤도기상위성개발

④선정기준

주요 국정 현안에 관한 사항

※ 국정관제[13] 우주기술자립으로 우주강국 실현

⑤사업기간

2012년∼2019년

⑥주요내용

○ 목적

- 천리안위성의 임무를 승계하고, 재해재난 대비 위험기상의 상시 관측과 기상예보 정확도 향상을 통한  국민안전에 기여하고 기후변화에 대응

○ 연구개발 기간 : 2012. 8. ~ 2019. 9.

○ 총사업비 : 총 1,574.9억원(85개월)           (단위: 백만원)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
예산	4,000	10,000	32,000	42,130	30,609	14,738	24,013

※`17년~`18년: 예정액

○ 연구기관 : 한국항공우주연구원

○ 주요내용

- 위험기상 감시 강화, 고품질 기상정보 제공을 위한 16채널의 시․공간 고해상도 차세대 기상탑재체 개발

- 태양활동 감시를 통한 우주기상 상시감시체계 기반 구축을 위한 우주 기상탑재체 개발

○ 추진경과

[정지궤도복합위성개발사업(기상청) 추진]
2007.	정지궤도복합위성 기상관측시스템 개발 기획연구
2009.	정지궤도복합위성 기상관측시스템의 사회경제적 편익분석을 위한 기획연구
2009.	기획재정부 상반기 예비타당성조사 실시
2009. 12.	정지궤도복합위성 기상관측시스템의 사회경제적 편익분석을 위한 기획연구
2010. 9.	정지궤도복합위성 개발 수시 예비타당성조사 통과
2012. 5 .	정지궤도기상위성 기상관측임무 사용자요구사항 수립
2012. 5.	정지궤도복합위성 개발계획 우주개발진흥실무위원회 통과
2012. 11.	기상탑재체 제안서 기술 및 가격 평가, 우선협상대상자(미국 ITT Exelis(사)) 선정(안) 승인
[계약체결 / 예비 설계 / 부분품 제작]
2013. 2.	기상탑재체 개발사업 계약체결 및 발효
2013. 4.	기상탑재체 시스템 설계 및 주요부품 제작 착수
2013. 10.	기상탑재체 시스템설계 검토 완료
2014. 2.	우주기상탑재체 계약체결(경희대학교)
2014. 3.	우주기상탑재체 착수회의 및 시스템요구사항 검토
2014. 4.	기상탑재체 예비설계 검토 완료
2014. 7.	우주기상탑재체 시스템설계검토 완료
[상세 설계 / 부분품 조립]
2015. 3.	기상탑재체 상세설계검토 /우주기상탑재체 예비설계검토
2015. 7.	기상탑재체 접속 시뮬레이터 개발 완료
2015. 9.	우주기상탑재체 상세설계 검토회의 완료
2015. 12.	우주기상탑재체 검증모델 개발 완료
[총 조립 / 성능·환경시험]
2016. 4.	정지궤도복합위성 2A 조립준비 검토회의
2016. 6.	기상탑재체 시험준비 검토회의