정책실명제 사업관리이력서

등록번호

2013-01

담당부서

작성자

(국가기상위성센터 / 위성기획과)

(김도형/070-7850-5705)

정 책 명

정지궤도기상위성개발

사업개요

□ 사업내용

○ 천리안 위성의 기상임무 연속성 확보를 위한 차세대 기상 및 우주기상탑재체 개발

- 위험기상 감시 강화, 고품질 기상정보 제공을 위한 16채널의 시공간 고해상도 기상탑재체 개발

- 우주기상 상시감시게쳬 기반 구축을 위한 우주기상탑재체 개발

□ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

□ 총사업비 : 1,372억원(2014년까지 기 투자액 : 46,000백만원)

□ 지원조건 : 출연

□ 주관연구기관 : 한국항공우주연구원

추진경과 및 사업관련자

□ 추진경과

○ ’07 : 정지궤도복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

○ ’09. 3월 : 정지궤도복합위성 예비타당성조사

○ ’09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

○ ’10. 6월 : 통신해양기상위성 발사성공

○ ’10. 9월 : 정지궤도복합위성 개발 수시 예비타당성조사 통과

- 기상위성, 해양/환경위성을 분리하여 2기의 위성개발 확정

○ ’12. 7월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 사용자요구사항 기술사항 세부 검토 위한 기술위원회 개최

○ ’12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 1차년도 사업 착수

○ ’12. 8월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제1차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 1차년도 사업계획(안) 등 심의․  의결

○ ’12. 11월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제2차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 우선협상대상업체 선정(안) 심의․  의결

○ ’13. 2월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제3차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 해외개발업체 계약(안) 심의․ 의결

○ ’13. 4월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제4차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 1차년도 사업평가 및 2차년도 사업계획(안) 심의․ 의결

○ ’13. 5월 : 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발사업 2차년도 사업 착수

○ ’13. 6월 : 정지궤도복합위성 개발 및 활용 협력을 위한 업무협약 체결(미래부․환경부․해수부․기상청)

○ ’13. 7월 : 중간진도점검 실시

○ ’13. 9월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제5차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발업체 선정을 위한 사업제안요구서(안) 및 선정 평가 방안(안) 심의․의결

○ ’13. 10월 : 기상탑재체 시스템 요구사항 검토회의

○ ’13. 12월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제6차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발을 위한 우선협상대상자 선정

○ ’14. 1월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제7차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발업체 계약(안) 심의․의결

○ ’14. 2월 : 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발업체(경희대 산합협력단) 계약 체결

○ ’14. 3월 : 우주기상탑재체 개발 착수회의 및 시스템요구사항 검토회의

○ ’14. 4월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 예비설계검토회의

○ ’14. 4월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제8차 개발위원회 개최

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 2차년도 사업평가 및 3차년도 사업계획(안) 심의․의결

○ ’14. 7월 : 우주기상탑재체 시스템설계검토회의

○ ’14. 10월 : 정지궤도기상위성 기상탑재체 제9차 개발위원회 개최

- 중간진도점검 실시

○ ’14. 11월 : 제1차 정지궤도복합위성 복사검보정협의체 회의 개최

○ 최초입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 위성기획과 기상연구관 김도형

- 최종 결재자 : 기상청 청장 고윤화

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	이재원	부이사관	’14.7.21.~현재	․ 국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	권태순	부이사관	’13.5.8.~’14.7.20.	․ 국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이희상	부이사관	’12.3.7~'13.5.7.	․ 국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	서애숙	부이사관	’12.1.1~‘12.3.6.	․ 국가기상위성센터 업무 총괄
과장	원재광	기술서기관	'13.7.8~현재	․ 위성기획과 업무 총괄
과장	김금란	기술서기관	'13.4.1~‘13.7.7.	․ 위성기획과 업무 총괄
과장	윤성득	기술서기관	'12.1.1~‘13.3.31.	․ 위성기획과 업무 총괄
연구관	김도형	기상연구관	'12.1.1~현재	정지궤도기상위성 개발사업 실무 총괄
연구사	이혜숙	기상연구사	'13.6.3~현재	정지궤도기상위성 개발사업 실무
연구사	나선미	기상연구사	‘12.7.2~’13.6.3.	정지궤도기상위성 개발사업 실무
연구사	박준동	기상연구사	’12.1.1~‘12.3.14.

○ 타부처

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김현수	부이사관	'14.2.~현재	․ 우주기술과 업무 총괄
과장	박경수	부이사관	'13.3.26.~'14.2.	․ 우주기술과 업무 총괄
과장	고서곤	부이사관	’12.6.13.~’13.3.25.	․ 우주기술과 업무 총괄
과장	김광용	기술서기관	’14.12.15.~현재	․ 해양영토과 업무 총괄
과장	권영상	기술서기관	'13.9.17.~'14.12.14	․ 해양영토과 업무 총괄
과장	강용석	기술서기관	’12.6.13.~‘13.9.16.	․ 해양영토과 업무 총괄
과장	홍정섭	부이사관	’14.4.21.~현재	․ 기후변화협력과 업무 총괄
과장	서흥원	부이사관	'12.6.13.~’14.4.20.	․ 기후변화협력과 업무 총괄
사무관	오남준	5급	'14.3.~ 현재	정지궤도복합위성 개발사업 실무 총괄
사무관	윤희봉	5급	'13.4.18.~'14.3.	정지궤도복합위성 개발사업 실무 총괄
사무관	이선미	5급	'13.3.28.~‘13.4.17.	정지궤도복합위성 개발사업 실무 총괄
사무관	임채호	5급	'12.6.13.~현재	정지궤도복합위성 해양탑재체개발실무총괄
사무관	김효식	5급	'12.6.13.~현재	정지궤도복합위성 환경탑재체개발실무총괄

<한국기상산업진흥원(전문기관)*>

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
원장	박○○	원장	’12.1.1. ~’13.7.10.	진흥원 업무 총괄
본부장	안○○	1급	’12.1.1.~’13.7.8.	진흥원 업무 부총괄
본부장	김○○	2급	’13.7.8.~	진흥원 업무 부총괄
실장	하○○	2급	’12.1.1.~’12.11.4.	R&D 업무 총괄
팀장	김○○	3급	'12.1.1.~	R&D 업무 총괄
대리	신○○	5급	'12.1.1.~	R&D 실무
사원	신○○	6급	'12.1.1.~	R&D 실무
사원	손○○	6급	'12.2.1.~	R&D 실무
사원	최○○	6급	'12.1.11.~‘13.9.1.	R&D 실무

*2014년 1월부터 전문기관 업무는 국가기상위성센터에서 수행

<개발위원회 위원>

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
위촉위원	김○○	위촉위원	’12.6.13.~’13.2.5	정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 정책결정 및 심의․의결
위촉위원	서○○	위촉위원	’12.6.13.~
위촉위원	안○○	위촉위원	’12.6.13.~
위촉위원	안○○	위촉위원	’12.6.13.~
위촉위원	이○○	위촉위원	’13.2.6.~
위촉위원	이○○	위촉위원	’12.6.13.~
위촉위원	이○○	위촉위원	’12.6.13.~

추진실적

<2012년도>

○ 정지궤도기상위성 개발사업 1차년도 협약 체결

- 기상청 ↔ 한국기상산업진흥원 : '12. 1. 1

- 한국기상산업진흥원 ↔ 한국항공우주연구원 : '12. 8.27

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 사용자 요구사항 기술사항 세부검토를 위한 기술위원회 개최

- 정지궤도 기상위성개발사업 추진현황 및 기상탑재체 사용자 요구사항 검토

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제1차 개발위원회

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 1차년도 사업계획(안) 및 해외개발업체 선정을 위한 사업제안요구서(안), 선정평가 방안(안) 심의·의결

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제2차 개발위원회

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 우선협상대상업체 선정(안) 심의·의결

<2013년도>

○ 정지궤도기상위성 개발사업 2차년도 협약 체결

- 기상청 ↔ 한국기상산업진흥원 : '13. 1. 1

- 한국기상산업진흥원 ↔ 한국항공우주연구원 : '13. 5. 1

○ 정지궤도복합위성 시스템설계검토회의 : '13. 2.20~2.22

- 요구사항에 따른 위성체 설계 계획(안), 기상탑재체 기하보정 포함 지상국 요구사항 등 논의

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제3차 개발위원회

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 해외개발업체 계약(안) 심의·의결

○ 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발업체 계약

- 개발업체(ITT Exelis) 계약 체결 완료

○ 기상탑재체 개발 착수회의(미국 ITT Exelis(사)) : '13.4.10.

○ 기상탑재체-위성체 접속기술회의(미국 ITT Exelis(사)) : '13.4.11.

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 중간진도점검 실시

- 수행과제 연구 진행사항 파악

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제4차 개발위원회

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 1차년도 사업평가

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제5차 개발위원회

- 우주기상탑재체 개발업체 선정을 위한 사업제안요구서(안) 및 선정 평가 방안(안) 심의·의결

○ 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 제안요청서(RFP) 배포 : '13.9.30

○ 정지궤도복합위성 시스템요구사항 추가 검토회의(항공우주연구원) : '13.10.17

- 우주기상탑재체, 위성체 접속 설계 업데이트 등

○ 기상탑재체 시스템 요구사항 검토회의(미국 ITT Exelis(사)) : '13.10.23

<2014년도>

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제7차 개발위원회 개최 : '14.1.28.

- 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발업체 계약(안) 심의․의결

○ 정지궤도기상위성 우주기상탑재체 개발업체(경희대 산합협력단) 계약 체결 : '14.2.7.

○ 우주기상탑재체 개발 착수회의 및 시스템요구사항 검토회의 : '14.3.21.

○ 기상탑재체 Spacewire 접속 시뮬레이터(Option#3) 계약 체결 : '14.3.31.

○ Gyro data 처리를 위한 기상탑재체 비행소프트웨어 수정 계약 체결 : '14.3.31.

○ 기상탑재체 예비설계 검토회의(미국 ITT Exelis(사)) : '14.4.8.~9.

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제8차 개발위원회 개최 : '14.4.21.

- 정지궤도기상위성 기상탑재체 개발사업 2차년도 사업평가 및 3차년도 사업계획(안) 심의․의결

○ 정지궤도기상위성 개발사업 3차년도 협약 체결

- 기상청 ↔ 한국항공우주연구원 : '14.5.1.

○ 우주기상탑재체 시스템설계검토회의((주)쎄트렉아이) : '14.7.14.

○ 정지궤도기상위성 기상탑재체 제9차 개발위원회 개최 : '14.10.27.

- 중간진도점검 실시

○ 제1차 정지궤도복합위성 복사검보정협의체 회의 개최 : '14.11.25.