정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2015-4

담당부서

작성자

국가기상위성센터/위성운영과

장재동/070-7850-5754

정 책 명

정지궤도 기상위성 지상국 개발

사업개요

및

추진경과

○ 목적

- `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의 국가기상위성센터 지상국 시스템을 개발 및 구축

○ 추진기간 : 2014.7 ~ 2019.5

○ 총사업비 : 5년간 총 911억원

○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI)

○ 주요내용

- 기상 및 우주기상 자료 수신처리 시스템 개발․구축

- 정지궤도 기상위성 (부)관제시스템 구축

- 기상위성 자료 관리 및 서비스 시스템 개발․구축

- 기상 및 우주기상 자료처리 알고리즘 개발

- 기상위성 자료 활용기술 개발

- 지상국 개발 사업관리 및 감리

○ 추진경과

- '07 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

- ‘09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

- ‘10. 11월 : 독자기상위성 자료처리 및 활용기술 개발 기획연구

- ‘11. 11월 : 정지궤도 기상위성 자료처리 기술개발 선행연구

- ‘11. 12월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기획연구

- ‘12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 착수

- ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

- ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

(AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

- ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

- ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

- ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

- ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

(국가기상위성센터 훈령 제22호)

- ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

- ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

- ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결 - ETRI

- '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

- ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

(한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

- ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

- ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR)

- '15. 3월 : 자료처리 알고리즘 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 활용기술 1차년도 선행연구 결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 우주기상 자료처리 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR)

- '15. 4월 : 지상국 개발 1차년도 연차평가

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 위성운영과 기상사무관 장재동

- 최종 결재자 : 기상청 청장 고윤화

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	권태순	부이사관	`13.5.8~`14.7.20	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이재원	부이사관	`14.7.21~`15.1.21	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이미선	부이사관	`15.1.22~현재	국가기상위성센터 업무 총괄
과장	손승희	기술서기관	`09.10.26~`14.3.30	위성운영과 업무 총괄
과장	연혁진	기술서기관	`14.3.31~현재	위성운영과 업무 총괄
사무관	장재동	기상사무관	`10.1.27~현재	지상국 개발사업 실무 총괄
담당	오현종	기상연구사	`10.11.30~현재	기상국 개발사업 기술분야 총괄
담당	김미주	8급	`10.4.30~14.3.30	기상국 개발사업 사업관리 총괄
담당	박성희	7급	`14.3.31~현재	기상국 개발사업 사업관리 총괄

다른 기관

또는

민간인 관련자

○ 지상국 개발위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	이○○	한국과학기술기획평가원 성장동력사업실 실장	정책, 계획
위촉위원	박○○	㈜에이알테크놀로지 전무이사	위성시스템
위촉위원	박○○	국방과학연구소 책임연구원	위성개발
위촉위원	지○○	한국해양과학기술원 부설 극지연구소 책임연구원	우주기상
위촉위원	김○○	충북대학교 정보통신공학부 교수	정보공학
위촉위원	김○○	연세대학교 대기과학과 교수	기상자료처리
위촉위원	조○○	서울대학교 지구환경과학부 교수	해양환경
위촉위원	최○○	한국형수치예보모델개발사업단 대외협력팀장	사업관리

○ 기상위성개발 추진위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	정○○	조선대학교 교수	기상관측
위촉위원	은○○	남서울대학교 교수	위성시스템
위촉위원	오○○	부경대학교 교수	기후
위촉위원	조○○	과학기술정책연구원 책임연구원	위성정책
위촉위원	장○○	한국항공대학교	위성시스템
위촉위원	김○○	한국해양과학기술원 책임연구원	위성자료활용
위촉위원	원○○	연세대학교 교수	원격탐사
위촉위원	변○○	KISTEP 사업조정본부장	기획평가

추진실적

<2014년도>

○ 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업 1차년도 협약 체결

- 주관연구기관: 한국전자통신연구원

- 연구기관/연구비: `14.7.1～`15.4.30 / 2,730백만원

○ 감리 용역사업 장기 계속 계약 체결

- 계약자: (주)한국정보기술단

- 계약기간/계약금액: `14.11.16～`19.6.30 / 1,240백만원

(1차년도: `14.11.6～`14.12.31 / 30백만원)

○ 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 구성도 >

- 분야별 시스템 요구사항 실무반 검토: ‘14.7.1～12.15

- 시스템 요구사항 검토회의(SRR): `14.12.16

- 지상국 시스템 요구사항 검토 기술단계 정기감리(5일간) 및 정기감리 종료회의(`14.12.12)

○ 감리 용역사업 2차년도 계약 체결

- 계약기간/계약금액: `15.1.1～12.31 / 287백만원

<2015년도>

○ 시스템 요구사항 검토 후속회의 (delta-SRR)

- 시스템 요구사항 검토 후속회의 개최: `15.1.27

< 사용자 요구사항 반영 현황 >

- 시스템 요구사항 검토 기술단계 2차 정기감리(10일간) 및 종료회의(`15.1.30)

○ 자료처리 알고리즘 및 활용기술 개발 분야 1차년도 추진

- 자료처리 및 활용기술 개발 중간보고(`15.1.29)

- 자료처리 알고리즘 1차년도 최종보고(`15.3.31)

- 활용기술 선행연구 최종보고(‘15.4.1)

- 우주기상 자료처리 기술 개발 1차년도 최종보고(‘15.4.10)

- 자료처리 알고리즘 23종 개발 및 활용기술 선행 연구(필요기술 선정 및 개발계획 등) 완료

○ 시스템 개념설계 검토회의(SDR) (`15.4.7)

- 지상국 및 6개 서브시스템 규격 작성

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 규격 현황 >

- 기상 요소 자료처리 알고리즘 개발 및 소통을 위한 공통테스트베드 시제품 개발

< 공통테스트베드 구성도 >

- 대형 송수신 안테나 2기 설치 후보지 조사(`15.3.10)