[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-4

담당부서

작성자

(기상청 / 슈퍼컴퓨터운영과)

(도성수/043-711-0230/ssdo@korea.kr)

정 책 명

기상용 슈퍼컴 운영

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 정부수해대책회의(’96.7.), 대통령업무보고(’98.4.) 및 ’98년 7~8월 집중호우에 따른 대통령 지시로 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 도입(’99.6.)

- 대통령 지시사항(’08.3.21) “기상예보는 산업과 밀접한 관련이 있어 기상예보의 정확도는 경제적 측면에서도 영향이 큰바, 과학적 예보로 발전해야 하며, 슈퍼컴퓨터에 걸 맞는 고급인력을 양성할 필요가 있음”

- 국정과제(총체적인 국가 재난관리 체계강화, 기후이변 등 기후변화 적응) 및 정부3.0 추진과제(빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현) 이행에 필수적인 전산인프라 구축

ㅇ 추진기간 : 1999 ~ 계속

ㅇ 총사업비 : 계속사업(’14년까지 기투자액 : 2,292억원)

ㅇ 2015년 사업비 : 25,658백만원

ㅇ 주요내용

(슈퍼컴퓨터 운영) 기상용 슈퍼컴의 안정적 운영을 통한 대국민 고품질 기상정보 제공

(수치예보시스템 운영) 슈퍼컴 기반 수치예보 현업의 안정적 운영 및 사용자 지원

(슈퍼컴퓨터 도입) 기상선진국 도약과 세계수준의 수치예보 및 기술력 확보를 위한 최신의 기상용 슈퍼컴퓨터 도입 추진

(슈퍼컴퓨터 공동활용) 국가 대기과학 분야 슈퍼컴퓨터 자원 공동활용 활성화 및 관련 분야 전문 인력 양성

ㅇ 추진경과

- 1998년 : 7~8월 집중호우로 인한 대규모 인명 및 재산피해 발생

- 1998년 : 슈퍼컴퓨터 도입 대통령 지시

슈퍼컴퓨터 1호기 도입 기본계획 수립

- 1998년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 도입을 위해 1999년 예산에 책정

- 1999년 2월 : 슈퍼컴퓨터 1호기 계약

- 1999년 6월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 1차분 도입 및 운영

- 2000년 6월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 2차분 도입 및 운영

- 2001년 3월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 기반 전지구모델(GSM T213L30) 현업 운영

- 2001년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 1호기 저장장치(2TB) 보강

- 2003년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 도입을 위해 2004년 예산에 책정

슈퍼컴퓨터 2호기 도입 기본계획 수립

- 2004년 5월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 계약

- 2004년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 1차분 도입 및 운영

- 2005년 9월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 2차분 도입 및 운영

- 2005년 12월 : 슈퍼컴퓨터 2호기 기반 전지구모델(GSM T426L40) 현업 운영

- 2006년 11월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 저장장치(30TB) 증설

- 2007년 11월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기 저장장치(300TB) 보강

- 2008년 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 도입을 위해 2009년 예산에 책정

- 2008년 2월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 기본계획 수립

- 2009년 9월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 계약

- 2009년 12월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 인터림 도입 및 운영

- 2010년 3월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 초기분(28TF) 도입 및 운영

- 2010년 5월 : 슈퍼컴퓨터 3호기 초기분 기반 전지구모델(UM 40km) 현업 운영

- 2010년 12월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 최종분(758TF) 도입 및 운영

- 2011년 5월 : 3호기 최종분 기반 고해상도(25km) 통합모델 현업 운영

- 2012년 6월 : 대기과학분야 슈퍼컴퓨터 지원 공동활용 지원계획 수립

- 2012년 12월 : 슈퍼컴퓨터 생산 자료 저장용 스토리지(8.1PB) 증설

- 2013년 2월 : 국가초고성능컴퓨팅 육성 시행계획 수립

- 2013년 4월 : 기상용 슈퍼컴퓨터 교체(4호기도입) 기본계획 수립

- 2013년 8월 :기상용 슈퍼컴퓨터 교체(4호기도입) 국가초고성능컴퓨팅위원회 심의·의결

- 2013년 12월 :기상용 슈퍼컴퓨터 4호기 제안요청서 확정 및 조달계약 의뢰

- 2013년 12월 :슈퍼컴퓨터 4호기용 기반시설 증축 공사 계약 및 착공

※ 증축 공사 계약 및 착공(’13.12.), 완공(’15. 3.)

- 2014년 1월 : 슈퍼컴 4호기 시스템 조달 발주(조달청 공고 1~3월)

- 2014년 3월 : 현장 맞춤형 슈퍼컴퓨터 사용자 교육(3.27~28/30명)

- 2014년 6월 : 슈퍼컴 4호기 낙찰자 선정(5월) 및 계약(6월)

※ 공급사/성능 : 미국 크레이(Cray)/초기분: 447TF, 최종분: 5,800TF(56,870백만원)

- 2014년 6월 : 2014년 포트란 프로그래밍 초급과정 개최(6.24~27/33명)

- 2014년 8월 : 2014년 슈퍼컴퓨터 사용자 워크숍 개최(8.28~29/85명)

- 2014년 12월 : 슈퍼컴 4호기 초기분 설치 및 검사·검수완료(12.22)

- 2014년 12월 : 기반설비 관급장비(전기, 기계) 설치 공사 완료(12.23)

※ 슈퍼컴 사용자 최적화 및 병렬화 기술지원(총 29건/’14.1∼12)

※ 국가 대기과학분야 활성화를 위한 슈퍼컴 자원 공동활용(총 12개 기관)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	고윤화	청장	13.9.26~현재	기상청 업무 총괄
차장	조주영	차장	13.4.12~14.3.10	기상청 업무 부총괄
차장	정홍상	차장	13.5.14~현재	기상청 업무 부총괄
관리관	임병숙	고위공무원	13.4.29~14.2.10	수치모델관리관실 총괄
관리관	이재병	고위공무원	14.4.19~14.7.20	수치모델관리관실 총괄
관리관	정준석	고위공무원	14.10.22~15.1.21	수치모델관리관실 총괄
과장	이경헌	4급	11.4.4~14.7.20	슈퍼컴퓨터운영과 총괄
과장	우종규	4급	14.7.21~14.12.31	슈퍼컴퓨터운영과 총괄
담당	이수홍	5급	13.7.8~14.7.20	슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당	최재천	4급	14.7.21~15.1.21	슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당	오하영	6급	10.1.27~현재	슈퍼컴 도입 및 시스템 관리
담당	김정훈	연구사	09.5.11~15.1.21	수치모델 최적화 및 성능개선
담당	장민수	7급	10.1.27~15.1.21	수치모델 운영환경 구축
담당	고정웅	7급	10.7.20~14.7.27	시스템관리 및 슈퍼컴공동활용
담당	김형규	7급	14.7.28~현재	시스템관리 및 슈퍼컴공동활용
국장	육명렬	고위공무원	15.1.22~현재	관측기반국 총괄
과장	김태희	4급	15.1.22~현재	슈퍼컴퓨터운영과 총괄
담당	이수홍	5급	15.1.22~현재	슈퍼컴도입,운영관리 정책 수립
담당	정혜리	7급	15.1.22~현재	슈퍼컴 사용자지원, 생산자료관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 기상청 슈퍼컴퓨터 교체(4호기 도입) 관련

구분	소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
4호기도입 추진위원회	고려대학교	명예교수	안○○	슈퍼컴퓨터 도입과 관련한 중요 사항에 대한 심의·의결
	숭실대학교	교수	최○○
	숙명여대	교수	김○○
	한국과학기술정보연구원	센터장	조○○
	핸디소프트	대표이사	이○○
	한국정보화진흥원	단장	강○○
	부경대학교	교수	오○○
	공주대학교	자연과학 대학장	서○○
	이화여자대학교	교수	박○○
	부산대학교	교수	안○○
4호기도입 전문위원회	숭실대학교	교수	최○○	슈퍼컴퓨터 도입과 관련한 사항 기술검토 및 사전 심의․조정
	세종대학교	교수	김○○
	울산과학기술 대학교	교수	김○○
	강릉원주대학교	교수	김○○
	한국과학기술 정보연구원	실장	박○○
	강릉원주대학교	교수	정○○
	부경대학교	교수	김○○

2015년 상반기 추진실적

ㅇ 2015년 국가초고성능컴퓨팅 육성 시행계획 작성 제출(미래부)

ㅇ 2015년 기상청 슈퍼컴퓨터 운영계획(안) 수립(1.28)

ㅇ 2015년 슈퍼컴퓨터 분야 전문인력 양성계획 수립(1.30)

ㅇ 2015년도 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 교육 실시(2.26~27/35명)

ㅇ 2015년도 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 추가교육 실시(3.19~20/25명)

ㅇ 슈퍼컴퓨터 4호기용 기반시설 증축공사 준공(3.27)

ㅇ 기상용 슈퍼컴퓨터 4호기 사용자 매뉴얼 기술노트 발간(3.27/200부)

ㅇ 2015년도 포트란 프로그래밍 과정 개최(4.28~5.1/36명)