[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	위성운영과	②담당자 (전화번호)	기술서기관 연혁진 기상사무관 장재동 (070-7850-5754)
③정책사업명	정지궤도 기상위성 지상국 개발
④선정기준	일정규모 이상의 연구용역	⑤사업기간	2014 ~ 2019
⑥주요내용	○ 목적 - `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의국가기상위성센터 지상국 시스템 개발 및 구축 ○ 사업기간 : 2014.7~2019.5 ○ 총사업비 : 5년간 총 911억원 ○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI) ○ 주요내용 - 기상 및 우주기상자료 수신처리시스템 개발 - 위성관제시스템 구축 및 시험 - 위성자료 관리 및 서비스시스템 개발 - 자료처리(기상 및 우주기상 요소 산출) 알고리즘 개발 - 위성자료 활용기술(예보 및 분석지원) 개발 - 지상국 개발 사업관리 및 감리 - 통합시험(궤도상 시험 기간 포함) 및 운영준비

[별지 제2호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2015-04

담당부서

작성자

국가기상위성센터/위성운영과

장재동/070-7850-5754

정 책 명

정지궤도 기상위성 지상국 개발

사업개요

및

추진경과

○ 목적

- `18년 상반기 발사 예정인 천리안 후속 정지궤도 기상위성의 국가기상위성센터 지상국 시스템을 개발 및 구축

○ 추진기간 : 2014.7 ~ 2019.5

○ 총사업비 : 5년간 총 911억원

○ 연구기관 : 한국전자통신연구원(ETRI)

○ 주요내용

- 기상 및 우주기상 자료 수신처리 시스템 개발․구축

- 정지궤도 기상위성 (부)관제시스템 구축

- 기상위성 자료 관리 및 서비스 시스템 개발․구축

- 기상 및 우주기상 자료처리 알고리즘 개발

- 기상위성 자료 활용기술 개발

- 지상국 개발 사업관리 및 감리

○ 추진경과

- '07 : 정지궤도 복합위성 기상관측시스템 개발을 위한 기획연구

- ‘09. 9월 : 우주기상업무 기본계획 수립을 위한 기획연구

- ‘10. 11월 : 독자기상위성 자료처리 및 활용기술 개발 기획연구

- ‘11. 11월 : 정지궤도 기상위성 자료처리 기술개발 선행연구

- ‘11. 12월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기획연구

- ‘12. 8월 : 정지궤도 복합위성 기상탑재체 개발사업 착수

- ‘12. 11월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 기초설계 연구

- ‘13. 2월 : 지상국 개발 예비타당성 조사 통과

(AHP 0.716 / 기간 ‘14~’18 / 예산 913억원)

- ‘13. 6~7월 : 지상국 개발 계획 부처 및 기관 의견조회

- ‘13. 7월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 계획 수립

- ‘14. 1~2월 : 지상국 제안요청서 전문가 검토 및 자문회의

- ‘14. 4월 : 기상위성 개발에 관한 처리규정 제정

(국가기상위성센터 훈령 제22호)

- ‘14. 4월 : 지상국 개발위원회 구성 및 제안요청서 심의

- ‘14. 5~6월 : 지상국 개발 주관연구기관 공모 및 선정

- ‘14. 7월 : 지상국 개발 R&D 과제 협약 체결 - ETRI

- '14. 9월 : 정지궤도 기상위성 지상국 개발 착수보고

- ‘14. 11월 : 지상국 개발 감리 용역사업 계약 체결

(한국정보기술단 / 기간 ‘14.11~’19.6 / 12.4억원)

- ‘14. 12월 : 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

- ‘15. 1월 : 시스템 요구사항 검토 후속회의(delta-SRR)

- '15. 3월 : 자료처리 알고리즘 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 활용기술 1차년도 선행연구 결과 최종보고

- ‘15. 4월 : 우주기상 자료처리 1차년도 개발 최종보고

- ‘15. 4월 : 시스템 개념설계 검토회의(SDR)

- '15. 4월 : 지상국 개발 1차년도 연차평가

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 위성운영과 기상사무관 장재동

- 최종 결재자 : 기상청 청장 고윤화

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
센터장	권태순	부이사관	`13.5.8～`14.7.20	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이재원	부이사관	`14.7.21～`15.1.21	국가기상위성센터 업무 총괄
센터장	이미선	부이사관	`15.1.22～현재	국가기상위성센터 업무 총괄
과장	손승희	기술서기관	`09.10.26～`14.3.30	위성운영과 업무 총괄
과장	연혁진	기술서기관	`14.3.31～현재	위성운영과 업무 총괄
사무관	장재동	기상사무관	`10.1.27～현재	지상국 개발사업 실무 총괄
담당	오현종	기상연구사	`10.11.30～현재	기상국 개발사업 기술분야 총괄
담당	김미주	8급	`10.4.30～14.3.30	기상국 개발사업 사업관리 총괄
담당	박성희	7급	`14.3.31～현재	기상국 개발사업 사업관리 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 지상국 개발위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	이윤빈	한국과학기술기획평가원 성장동력사업실 실장	정책, 계획
위촉위원	박세경	㈜에이알테크놀로지 전무이사	위성시스템
위촉위원	박강민	국방과학연구소 책임연구원	위성개발
위촉위원	지건화	한국해양과학기술원 부설 극지연구소 책임연구원	우주기상
위촉위원	김남	충북대학교 정보통신공학부 교수	정보공학
위촉위원	김준	연세대학교 대기과학과 교수	기상자료처리
위촉위원	조양기	서울대학교 지구환경과학부 교수	해양환경
위촉위원	최이태	한국형수치예보모델개발사업단 대외협력팀장	사업관리

○ 기상위성개발 추진위원회

구분	성명	소속 및 직위	전문분야
위촉위원	정효상	조선대학교 교수	기상관측
위촉위원	은종원	남서울대학교 교수	위성시스템
위촉위원	오재호	부경대학교 교수	기후
위촉위원	조황희	과학기술정책연구원 책임연구원	위성정책
위촉위원	장영근	한국항공대학교	위성시스템
위촉위원	김철호	한국해양과학기술원 책임연구원	위성자료활용
위촉위원	원중선	연세대학교 교수	원격탐사
위촉위원	변순천	KISTEP 사업조정본부장	기획평가

추진실적

<2014년도>

○ 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업 1차년도 협약 체결

- 주관연구기관: 한국전자통신연구원

- 연구기관/연구비: `14.7.1～`15.4.30 / 2,730백만원

○ 감리 용역사업 장기 계속 계약 체결

- 계약자: (주)한국정보기술단

- 계약기간/계약금액: `14.11.16～`19.6.30 / 1,240백만원

(1차년도: `14.11.6～`14.12.31 / 30백만원)

○ 시스템 요구사항 검토회의(SRR)

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 구성도 >

- 분야별 시스템 요구사항 실무반 검토: ‘14.7.1～12.15

- 시스템 요구사항 검토회의(SRR): `14.12.16

- 지상국 시스템 요구사항 검토 기술단계 정기감리(5일간) 및 정기감리 종료회의(`14.12.12)

○ 감리 용역사업 2차년도 계약 체결

- 계약기간/계약금액: `15.1.1～12.31 / 287백만원

<2015년도>

○ 시스템 요구사항 검토 후속회의 (delta-SRR)

- 시스템 요구사항 검토 후속회의 개최: `15.1.27

< 사용자 요구사항 반영 현황 >

- 시스템 요구사항 검토 기술단계 2차 정기감리(10일간) 및 종료회의(`15.1.30)

○ 자료처리 알고리즘 및 활용기술 개발 분야 1차년도 추진

- 자료처리 및 활용기술 개발 중간보고(`15.1.29)

- 자료처리 알고리즘 1차년도 최종보고(`15.3.31)

- 활용기술 선행연구 최종보고(‘15.4.1)

- 우주기상 자료처리 기술 개발 1차년도 최종보고(‘15.4.10)

- 자료처리 알고리즘 23종 개발 및 활용기술 선행 연구(필요기술 선정 및 개발계획 등) 완료

○ 시스템 개념설계 검토회의(SDR) (`15.4.7)

- 지상국 및 6개 서브시스템 규격 작성

< 후속 정지궤도 기상위성 지상국 규격 현황 >

- 기상 요소 자료처리 알고리즘 개발 및 소통을 위한 공통테스트베드 시제품 개발

< 공통테스트베드 구성도 >

- 대형 송수신 안테나 2기 설치 후보지 조사(`15.3.10)

[별지 제3호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 현황

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2015-1	국가태풍센터 운영	국가태풍센터	과장 : 담당 :
2015-2	기후변화관측망 보강	기후변화감시센터	과장 : 담당 :
2015-3	기상지식보급 및 사회 확산	인력개발과	과장 : 담당 :
2015-4	정지궤도 기상위성 지상국 개발	위성운영과	과장 : 기술서기관 연혁진 담당 : 기상사무관 장재동